Закон г. Москвы от 16 июля 2008 г. N 38
  "О внесении изменений в Закон города Москвы от 5 июля 2006 года N 33
"О Программе комплексного развития системы электроснабжения города Москвы
 на 2006 - 2010 годы и инвестиционных программах развития и модернизации
                 инфраструктуры электроснабжения города"

     Статья 1
     1. Статью 2 изложить в следующей редакции:

     "Статья 2. Об инвестиционных  программах  развития  и   модернизации
                 инфраструктуры электроснабжения города Москвы
     1. Утвердить согласованные Правительством Москвы и   электросетевыми
организациями  инвестиционные   программы   развития   и     модернизации
инфраструктуры электроснабжения города  Москвы,  финансируемые  за   счет
платы за технологическое присоединение:
     1)  ОАО  "Мосэнерго"  -  по  сооружению  дополнительных     головных
распределительных устройств на электростанциях (приложение 2);
     2) ОАО  "Московская  объединенная  электросетевая  компания"   -  по
строительству и реконструкции трансформаторных электроподстанций и линий
электропередачи 110 - 220 кВ (приложение 3);
     3) ОАО "Объединенная энергетическая компания"  -  по   строительству
трансформаторных электроподстанций и линий электропередачи 110 - 220   кВ
(приложение 4);
     4)  ОАО  "Энергокомплекс"  -  по  строительству     трансформаторных
электроподстанций и линий электропередачи 110 - 220 кВ (приложение 5);
     5)  ОАО  "Московская  городская  электросетевая  компания"  -   по
строительству   и   реконструкции   трансформаторных         подстанций и
распределительных сетей с напряжением ниже 35 кВ (приложение 6);
     6) ГУП "Москоллектор"  -  по  строительству  кабельных   коллекторов
(приложение 7).
     2.  Утвердить  инвестиционную  программу  Правительства    Москвы по
строительству кабельных коллекторов (приложение 8).".
     2. Приложение 1 к Закону изложить в следующей редакции:

                                                            "Приложение 1
                                                   к Закону города Москвы
                                                 от 5 июля 2006 года N 33

Программа комплексного развития системы электроснабжения города Москвы на
                            2006 - 2010 годы

     В течение последних 5 - 6 лет в Москве и Московской области   быстро
восстанавливалось промышленное производство.  Одновременно   опережающими
темпами росло энергопотребление  жилищного  фонда  и  предприятий   сферы
обслуживания  населения.  В  2005  году  потребление     электроэнергии в
московском регионе на 24 процента превысило уровень 1990 года. В  то   же
время  не  только  отсутствовал  ввод   новых   мощностей     в   системе
электроснабжения города  Москвы,  но  и  восстановление    существующих в
должной мере не производилось.
     В результате к 2006 году  система  электроснабжения  города   Москвы
стала энергодефицитной. Даже непродолжительный цикл низких температур   в
январе 2006 года вынудил ввести  ограничения  потребления   электрической
мощности на 680 МВт ради сохранения устойчивости системы. Единовременная
нагрузка в системе достигла 16093 МВт, максимальная рабочая  мощность   и
аварийный мобилизационный резерв были использованы полностью.
     Авария на  электроподстанции  в  Чагино  в  2005  году    лишний раз
показала,  насколько  опасным  стал  износ  основных   фондов   системы
электроснабжения города  Москвы.  К  середине  2006  года  в     85 из 99
электроподстанций города на 110 - 220 кВ была полностью выбрана проектная
мощность,  и  они  были  закрыты   для   дополнительных     присоединений
потребителей. Возникла угроза остановки развития  города,  в  том   числе
жилищного строительства.
     Правительством  Москвы,  правлением  ОАО  РАО   "ЕЭС       России" и
руководством энергетических компаний разработаны Программа   комплексного
развития системы электроснабжения города Москвы на 2006 -  2010  годы  и
инвестиционные  программы  развития   и   модернизации     инфраструктуры
электроснабжения города. Программа направлена  на  повышение   надежности
энергоснабжения потребителей, увеличение пропускной  способности   сетей,
ликвидацию  дефицита   мощности   в   условиях       стремительного роста
электропотребления.  Реализация  Программы  началась  в    соответствии с
соглашением, подписанным  Мэром  Москвы  Ю.М. Лужковым  и   председателем
правления РАО "ЕЭС России" А.Б. Чубайсом.
     За  прошедший  с   начала   реализации   инвестиционных   программ
энергетических компаний период произошли существенные изменения. Задачи,
поставленные Правительством Москвы по сокращению дефицита энергомощности,
успешно реализуются как за счет бюджета города Москвы,  так  и  за   счет
инвестиционной составляющей.
     С учетом произошедших изменений Правительством  Москвы,   правлением
ОАО РАО "ЕЭС России" и руководством энергетических компаний было принято
решение о необходимости актуализации имеющихся  инвестиционных   программ
развития и модернизации инфраструктуры электроснабжения города Москвы.
     В мае 2008 года  был  подписан  протокол  о  внесении    изменений и
дополнений в Соглашение о взаимодействии Правительства Москвы и ОАО   РАО
"ЕЭС России" при реализации инвестиционных программ по  строительству   и
реконструкции электроэнергетических объектов  для  недопущения   дефицита
мощности и повышения надежности электроснабжения потребителей Москвы.
     Строительство намечено финансировать за счет бюджета города Москвы,
собственных и привлеченных средств энергетических компаний ОАО РАО   "ЕЭС
России",  внебюджетных  источников,  средств   инвесторов,       платы за
технологическое присоединение. Объем инвестиций по Программе оценивается
более чем в 500 млрд. рублей.
     В рамках реализации Программы сетевые компании ОАО РАО "ЕЭС России",
Правительство  Москвы,   частные   инвесторы   продолжат     осуществлять
инвестиционные проекты по увеличению пропускной способности электрических
сетей и повышению их надежности, а также выполнению работ по   сооружению
на территории города Москвы объектов генерации.
     В  период  до  2010  года  будет  введено  около  25,3    тыс.   МВА
трансформаторной  мощности,  осуществлено  строительство   более   9800
километров линий электропередачи различных классов напряжения, построено
более 150 километров кабельных коллекторов различного диаметра.
     ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" на
объектах  единой  национальной  электрической  сети  за   счет   нового
строительства  и  реконструкции  планирует  ввести  в  строй     4157 МВА
трансформаторной  мощности  и  высоковольтные   линии     электропередачи
протяженностью 164 километра. Основные объекты реконструкции - подстанции
500 кВ "Очаково", "Чагино", "Бескудниково",  подстанция  750  кВ   "Белый
Раст", нового строительства - подстанция 500  кВ  "Западная",   воздушные
линии электропередачи 500 и 220 кВ.
     Программа  предусматривает   развитие   городской     высоковольтной
распределительной сети с увеличением трансформаторной мощности подстанций
110 -  220  кВ,  а  также  строительство  воздушных  и    кабельных линий
электропередачи на это напряжение,  что  обеспечивается   инвестиционными
программами: ОАО "Мосэнерго", ОАО "Московская объединенная электросетевая
компания",   ОАО   "Объединенная   энергетическая         компания" и ОАО
"Энергокомплекс".
     Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго"  предусматривает   введение
615 МВт и 501 МВА с объемом затрат в сумме 5 514, 622 млн. рублей.
     Инвестиционная программа ОАО "Московская объединенная электросетевая
компания" предусматривает введение 12324 МВА с объемом затрат в сумме 138
921,40 млн. рублей.
     Инвестиционная программа ОАО "Объединенная энергетическая компания"
предусматривает введение 3326 МВА с объемом затрат в сумме 34 965,43 млн.
рублей.
     Инвестиционная  программа  ОАО  "Энергокомплекс"     предусматривает
введение 4080 МВА с объемом затрат в сумме 80 388,98 млн. рублей.
     Инвестиционная программа ОАО "Московская  городская   электросетевая
компания" предусматривает объем затрат в сумме 133 144,17 млн. рублей.
     Инвестиционная программа ГУП "Москоллектор" предусматривает введение
94,43 километра кабельных коллекторов с объемом затрат в сумме 39 552,10
млн. рублей.
     Инвестиционная  программа  Правительства  Москвы  по   строительству
кабельных коллекторов предусматривает объем  затрат  из  бюджета   города
Москвы в сумме 27 280,65 млн. рублей.".
     3. Приложение 2 к Закону изложить в следующей редакции:

                                                            "Приложение 2
                                                   к Закону города Москвы
                                                 от 5 июля 2006 года N 33

                               Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго"
         по сооружению дополнительных головных распределительных устройств на электростанциях

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------N
| Наименование |Мощность|Едини-|    2006 год    |   2007 год    |   2008 год   |  2009 год   | Стои-  |
|   объекта    |проект- |  ца  |----------------+---------------+--------------+-------------| мость  |
|              |  ная   |изме- | мощ-  | цены,  | мощ- | цены,  | мощ- | цены, | мощ- |цены, |объекта,|
|              |        |рения |ность, |  млн.  |ность,|  млн.  |ность,| млн.  |ность,| млн. |  млн.  |
|              |        |      |  МВт  | рублей | МВт  | рублей | МВт  |рублей | МВт  |рублей| рублей |
|--------------+--------+------+-------+--------+------+--------+------+-------+------+------+--------|
|Реконструкция |   20   | МВт  |  20   | 12,035 |      |        |      |       |      |      | 12,035 |
|ГРУ, ТЭЦ-8    |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|--------------+--------+------+-------+--------+------+--------+------+-------+------+------+--------|
|Реконструкция |   32   | МВт  |  20   |126,616 |  12  | 83,298 |      |       |      |      |209,914 |
|ГРУ, ТЭЦ-11   |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|--------------+--------+------+-------+--------+------+--------+------+-------+------+------+--------|
|Реконструкция |   0    | МВт  |       | 47,91  |      |245,764 |      |       |      |      |293,674 |
|ГРУ (1-3      |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|секция),      |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|ТЭЦ-12        |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|--------------+--------+------+-------+--------+------+--------+------+-------+------+------+--------|
|Расширение ГРУ|   80   | МВт  |  40   |273,042 |  40  |375,246 |      |       |      |      |648,288 |
|и             |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|строительство |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|зданий ЗРУ 20 |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|кВ и КРУЭ 110 |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|кВ, ТЭЦ-16    |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|--------------+--------+------+-------+--------+------+--------+------+-------+------+------+--------|
|Реконструкция |   20   | МВт  |   0   | 92,794 |  20  |137,438 |      |       |      |      |230,232 |
|ГРУ, ТЭЦ-20   |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|--------------+--------+------+-------+--------+------+--------+------+-------+------+------+--------|
|Реконструкция |   92   | МВт  |  12   |109,705 |  80  | 427,7  |      |       |      |      |537,405 |
|ГРУ, ТЭЦ-21   |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|--------------+--------+------+-------+--------+------+--------+------+-------+------+------+--------|
|Реконструкция |   16   | МВт  |  16   | 4,523  |      |        |      |       |      |      | 4,523  |
|ГРУ, ТЭЦ-23   |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|--------------+--------+------+-------+--------+------+--------+------+-------+------+------+--------|
|Реконструкция |   8    | МВт  |   8   | 3,215  |      |        |      |       |      |      | 3,215  |
|ГРУ, ТЭЦ-25   |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|--------------+--------+------+-------+--------+------+--------+------+-------+------+------+--------|
|Реконструкция |   40   | МВт  |   0   | 37,376 |  40  |158,831 |      |       |      |      |196,207 |
|ГРУ, ТЭЦ-26   |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|--------------+--------+------+-------+--------+------+--------+------+-------+------+------+--------|
|Реконструкция |   96   | МВт  |  16   | 64,444 |  80  |304,845 |      |       |      |      |369,289 |
|ГРУ, ТЭЦ-27   |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|--------------+--------+------+-------+--------+------+--------+------+-------+------+------+--------|
|Ввод AT N 2,  |  501   | МВА  |   0   | 113,79 |      | 516,05 |      |       |      |      | 629,84 |
|500/220 кВ,   |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|ТЭЦ-26        |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|--------------+--------+------+-------+--------+------+--------+------+-------+------+------+--------|
|ТЭЦ-9, замена |   80   | МВА  |       |        |      |        |  11  |  70   |      |      |   70   |
|трансформатора|        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|связи Т-2     |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|ТДТ-60000/110 |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|на            |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|ТРДЦН-80000/11|        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|0             |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|--------------+--------+------+-------+--------+------+--------+------+-------+------+------+--------|
|ТЭЦ-11,       |        |      |       |        |      |        |  6   |  100  |      |      |  100   |
|реконструкция |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|ГРУ-10 кВ     |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|--------------+--------+------+-------+--------+------+--------+------+-------+------+------+--------|
|ТЭЦ-12, замена|   80   | МВА  |       |        |      |        |  9   |  70   |      |      |   70   |
|трансформатора|        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|связи Т-1     |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|ТДТ-63 000/110|        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|на            |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|ТРДЦН-80000/11|        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|0             |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|--------------+--------+------+-------+--------+------+--------+------+-------+------+------+--------|
|ТЭЦ-12, замена|   80   | МВА  |       |        |      |        |  11  |  70   |      |      |   70   |
|трансформатора|        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|связи Т-1     |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|ТДТ-60000/110 |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|на            |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|ТРДЦН-80000/11|        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|0             |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|--------------+--------+------+-------+--------+------+--------+------+-------+------+------+--------|
|ТЭЦ-12,       |        |      |       |        |      |        |  6   |  170  |      |      |  170   |
|реконструкция |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|ГРУ-10 кВ     |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|--------------+--------+------+-------+--------+------+--------+------+-------+------+------+--------|
|ТЭЦ-25,       |        |      |       |        |      |        |  24  |  300  |      |      |  300   |
|реконструкция |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|ГРУ-10 кВ     |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|--------------+--------+------+-------+--------+------+--------+------+-------+------+------+--------|
|ТЭЦ-26,       |        |      |       |        |      |        |  24  |  300  |      |      |  300   |
|реконструкция |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|ГРУ-10 кВ     |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|--------------+--------+------+-------+--------+------+--------+------+-------+------+------+--------|
|ТЭЦ-20, ввод  |  3x80  | МВА  |       |        |      |        |      |  330  | 120  | 970  |  1300  |
|КРУЭ-220 кВ   |        |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|--------------+--------+------+-------+--------+------+--------+------+-------+------+------+--------|
|Итого по ОАО  |615 МВт |      |  132  | 885,45 | 272  |2249,172|  91  | 1410  | 120  | 970  |5514,622|
|"Мосэнерго"   | + 501  |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
|              |  МВА   |      |       |        |      |        |      |       |      |      |        |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
                                                                                                     ".

     4. Приложение 3 к Закону изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                     "Приложение 3
                                                                                                                            к Закону города Москвы
                                                                                                                          от 5 июля 2006 года N 33

Инвестиционная программа ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" по строительству и реконструкции трансформаторных электроподстанций
                                                       и линий электропередачи 110 - 220 кВ

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
| N | Наименование  | Ед.  |  Мощн.  |Прирост| Срок  |    2006 год    |   2007 год   |    2008 год     |    2009 год     |     2010 год      |Ориенти- |
|п/п|    объекта    | изм. | проект. | мощн. | ввода |----------------+--------------+-----------------+-----------------+-------------------|ровочная |
|   |               |      |         | (МВА) |       | ввод  | цены,  |ввод | цены,  |  ввод  | цены,  |  ввод  | цены,  |   ввод   | цены,  |стоимость|
|   |               |      |         |       |       |мощнос-|  млн.  |мощ- |  млн.  |мощности|  млн.  |мощности|  млн.  |мощности, |  млн.  |объекта, |
|   |               |      |         |       |       |ти, МВА| рублей |ности| рублей |   ,    | рублей |   ,    | рублей |   МВА    | рублей |  млн.   |
|   |               |      |         |       |       |       |        |  ,  |        |  МВА   |        |  МВА   |        |          |        | рублей  |
|   |               |      |         |       |       |       |        | МВА |        |        |        |        |        |          |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 Новое строительство                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |ПС             | МВА  |  2x63   |  126  | 2006  | 2x63  |  334   |     |        |        |        |        |        |          |        | 334,00  |
|   |"Левобережная" |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |("Нарвская")   |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |220/10 кВ      |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|2. |ПС   "Говорово"| МВА  |  3х100  |  300  |2006 - |       |1231,05 |3x100| 258,74 |        | 36,00  |        |        |          |        | 1525,79 |
|   |220/10 кВ      |      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|3. |ПС  "Руднево-1"| МВА  |  2x100  |  200  |2006 - |  пир  | 53,92  |2x100|1170,00 |        | 70,00  |        |        |          |        | 1293,92 |
|   |220/10 кВ      |      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|4. |ПС             | МВА  |  4x80   |  320  |2007 - |       |        |     |  3,00  |        | 200,00 |        |1024,00 |   4x80   |2276,00 |  3503   |
|   |"Берсеньевская"|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |110/20/10/6 кВ |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|5. |Ввод  в  работу|  км  |   15    |       |2006 - |       |  6,34  |     | 158,53 |   15   | 387,52 |        |        |          |        | 552,39  |
|   |второй     цепи|      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |ВЛ-220       кВ|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"ТЭЦ-26       -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Ясенево"       |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |(вторая    цепь|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |транзита 220 кВ|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |ТЭЦ-26 "Боброво|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |-     Ясенево")|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |(провод АС-400)|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|6. |Воздушный      |  км  |   1x8   |   8   |2007 - |       |  3,28  | 1x8 | 160,81 |        | 82,19  |        |        |          |        | 246,28  |
|   |участок КВЛ-220|      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ     "ТЭЦ-27-|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Бутырки"       |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|7. |Строительство  |  км  |   17    |       |2006 - |       |  7,54  | 17  | 107,64 |        | 12,82  |        |        |          |        | 128,00  |
|   |второй     цепи|      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |ВЛ-220       кВ|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Очаково      -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Чоботы П"      |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|8. |ПС "МГУ" 110/20| МВА  |  2x80   |  160  |2007 - |       |        |     | 20,22  |        |1329,78 |  2x80  | 500,00 |          |        | 1850,00 |
|   |кВ             |      |         |       | 2009  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|9. |ПС     "Бутово"| МВА  |  2x250  |  700  |2007 - |       |        |     | 28,05  | 2x250  |1800,00 |   0    | 400,00 |  2х 100  | 542,41 | 2770,46 |
|   |220/110/20/10  |      |  2x100  |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ             |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|10.|ПС             | МВА  |  2x250  |  660  |2007 - |       |  0,09  |     | 52,54  |        |1200,00 | 2x250  |1297,37 |   2x80   | 600,00 | 3150,00 |
|   |"Н.-Гоголево"  |      |  2x80   |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |("Орешково")   |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |220/110/20/10  |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ             |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|11.|ПС  220    кВ в| МВА  |  2x200  |  400  |2008 - |       |        |     |        |        |  2,00  |  пир   | 83,00  |  2x200   |4315,00 | 4400,00 |
|   |ЮЗАО           |      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |(Академический,|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Зюзино,        |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Котловка) или в|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |ЮАО (Нагорный) |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|12.|ПС             | МВА  |  2x200  |  400  |2008 - |       |        |     |        |  пир   | 909,79 |        | 397,75 |  2x200   | 507,46 | 1815,00 |
|   |"Кожевническая"|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |220/20/10 кВ   |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|   |Итого по новому| МВА  |  3266   | 3266  |       |  126  |16362,2 | 500 |1959,53 |  500   |6030,10 |  660   |3702,12 |   1480   |8240,87 |21568,84 |
|   |строительству  |------+---------+-------|       |-------|        |-----|        |--------|        |--------|        |----------|        |         |
|   |               |  км  |   40    |   8   |       |   0   |        | 25  |        |   15   |        |   0    |        |    0     |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    Реконструкция                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |ПС "Маяковская"| МВА  |  2x80   |  34   |2005 - | 2x80  | 125,00 |     |  4,19  |        |  2,79  |        |        |          |        | 131,98  |
|   |110/10 кВ      |      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|2. |ПС  "Планерная"| шт.  |    6    |       |2007 - |       |        |     |  8,00  |   6    | 152,00 |        |        |          |        | 160,00  |
|   |110/10 кВ      |      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|3. |ПС   "Пенягино"| МВА  |  1x32   |  32   |2006 - |  пир  | 51,00  |1x32 | 74,75  |        |  1,60  |        |        |          |        | 127,35  |
|   |220/110/10 кВ  |      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|4. |ПС "Павелецкая"| МВА  |  2x250  |       |2007 - |       |        |     | 92,97  |  3x63  | 460,00 | 2x250  | 47,03  |          |        | 600,00  |
|   |220/110/10 кВ  |      |  3x63   |       | 2009  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|5. |ПС      "Теплый| МВА  |  2x80   |       |2006 - | 2x80  | 682,43 |     | 44,43  |        |        |        |        |          |        | 726,86  |
|   |Стан"  110/10/6|      |         |       | 2007  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ             |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|6. |Замена  провода|  км  |    7    |       | 2006  |   7   | 35,35  |     |        |        |        |        |        |          |        |  35,35  |
|   |ВЛ-110       кВ|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Ясенево      -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Теплый Стан" на|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |АС   240    или|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |строительство  |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |второй     цепи|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |этой линии     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|7. |ПС      "Полет"| шт.  |    9    |       |2006 - |       | 668,47 |     | 264,96 |   9    |  3,70  |        |        |          |        | 936,86  |
|   |110/10 кВ      |      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|8. |ПС "Сокольники"| МВА  |  1x63   |       |2006 - | 1x63  | 170,00 |     | 142,72 |        | 52,50  |        |        |          |        | 365,22  |
|   |110/10/6 кВ    |      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|9. |ПС      "Омега"| МВА  |  2x250  |  250  |2006 - | 1х250 | 897,96 |  1  | 342,23 |        | 26,00  |        |        |          |        | 1266,19 |
|   |220/110/10 кВ  |      |         |       | 2008  |       |        |х250 |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|10.|ПС             | МВА  |  2x250  |  700  |2006 - |       | 54,54  |     | 714,00 | 2x250  |1646,69 |        | 459,72 |  2х 100  | 715,05 | 3590,00 |
|   |"Новобратцево" |      |  2x100  |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |110/10/6     кВ|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Перевод      на|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |напряжение  220|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ             |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|11.|Замена         | шт.  |    7    |       |2006 - |       |  0,13  |     | 87,66  |   7    | 572,21 |        |        |          |        | 660,00  |
|   |выключателей   |      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |110  кВ  на  ПС|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Октябрьская"  |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |(для  включения|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |ПС "Герцево")  |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|12.|Реконструкция  | шт.  |    5    |       |2007 - |       |        |     | 111,81 |   5    | 90,19  |        |        |          |        | 202,00  |
|   |ПС  110/10   кВ|      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Ангелово" (для|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |включения    ПС|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Герцево")     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|13.|Реконструкция  |  км  |    6    |       |2006 - |       |  0,13  |     | 24,29  |   6    | 125,58 |        |        |          |        | 150,00  |
|   |ПС 110/35/6  кВ|      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Хуторская"   с|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |заходами ВЛ-110|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ "Хуторская -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Герцево"   (для|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |включения    ПС|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Герцево")     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|14.|Заходы   ВЛ-220|  км  |  2x0,5  |       |2007 - |       |        |     |        | 2x0,5  | 140,00 |        |        |          |        | 140,00  |
|   |кВ (Центральная|      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |-              |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Красногорская" |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |на ПС "Герцево"|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |(для  включения|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |ПС (Герцево")  |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|15.|ВЛ-220       кВ|  км  |   10    |       |2007 - |       |        |     | 350,83 |   10   | 564,37 |        |        |          |        | 915,20  |
|   |"Красногорская |      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |- Герцево 1, 2"|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |(для  включения|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |ПС "Герцево")  |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|16.|Реконструкция  |  км  |    9    |       |2007 - |       |  0,08  |     | 26,96  |   9    | 65,04  |        |        |          |        |  92,08  |
|   |сети 110 кВ для|      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |включения    ПС|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Герцево"     с|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |образованием   |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |ВЛ-110       кВ|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Тушино       -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Герцево 1,  2",|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Герцево      -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Ангелово",     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Герцево      -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Павшино"       |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|17.|ПС   220/110/10| МВА  |  2x250  |  100  |2007 - |       |        |     | 65,80  | 2x250  | 767,16 |        |        |          |        | 832,96  |
|   |кВ "Елоховская"|      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|18.|ПС     "Угреша"| МВА  |  2x63   |  206  |2005 - | 2x63  |1111,23 |     | 195,56 |        | 70,00  |        |        |          |        | 1376,79 |
|   |110/10/6 кВ    |      |  2x40   |       | 2008  | 2x40  |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|19.|Реконструкция  | шт.  |   10    |       |2006 - |       |        |     |        |        | 161,25 |   10   | 255,90 |          |        | 417,15  |
|   |ОРУ  ПО  кВ  ПС|      |         |       | 2009  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |110/10/6     кВ|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Тушино"       |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|20.|ВЛ-110       кВ|  км  |  1x4,8  |       |2006 - |       |  0,05  |1х4,8| 53,02  |        | 38,68  |        |        |          |        |  91,75  |
|   |"ТЭЦ-21       -|      |  1 x 1  |       | 2008  |       |        | 1x1 |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Бутаково"     с|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |отпайкой,      |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Бусиновская 2"|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |с отпайкой     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|21.|Реконструкция  |  км  |   15    |       |2006 - |       |  0,07  |  5  | 183,36 |   10   | 496,47 |        |        |          |        | 679,90  |
|   |ВЛ-110       кВ|      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Старбеево    -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Планерная"    и|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Ангелово     -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Октябрьская"   |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |(для  включения|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |ПС "Герцево")  |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|22.|Реконструкция  |  км  |   5,4   |       |2006 - |       |  0,04  | 5,4 |  5,90  |        | 44,10  |        |        |          |        |  50,04  |
|   |ВЛ-110  кВ  "Н.|      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Братцево      -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Тушино"  и  "Н.|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Братцево      -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Хутоская"  (для|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |включения    ПС|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Герцево")     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|23.|Реконструкция  |  км  |   2x3   |       | 2008  |       |        |     | 134,73 |  2x3   | 465,50 |        |        |          |        | 600,23  |
|   |КВЛ-110      кВ|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Тимирязевские |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |А   и      Б" с|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |отпайкой   (для|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |включения    ПС|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Герцево")     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|24.|Воздушный      |  км  |  1х2,5  |       |2007 - |       |        |1х2,5|  1,30  |        | 18,70  |        |        |          |        |  20,00  |
|   |участок КВЛ-220|      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ  "Бутырская"|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |от  ПП-205   до|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |ПП-206         |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|25.|Перевод      ПС| МВА  |  4x63   |  117  |2006 - |       | 24,03  |     | 832,48 |        |1000,00 |  4x63  | 831,49 |          |        | 2688,00 |
|   |"Бабушкин"     |      |         |       | 2009  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |110/10/6 кВ  на|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |220 кВ         |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|26.|ПС  "Чертаново"| МВА  |  2x250  |  300  |2007 - |       |  0,21  |     | 242,89 | 2x250  | 33,75  | 2x100  | 639,36 |          |        | 916,21  |
|   |220/110/10 кВ  |      |  2х100  |       | 2009  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|27.|ПС             | МВА  |  3x63   |  63   |2006 - |       | 32,49  |     | 925,49 |  3x63  |561,713 |        |        |          |        | 1519,69 |
|   |"Семеновская"  |      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |110/10 кВ      |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|28.|ПС             | МВА  |  2x200  |  600  |2007 - |       |        |     |        |        | 300,00 | 2х 100 | 828,00 |  2x200   |1597,42 | 2725,42 |
|   |"Белорусская"  |      | 2х 100  |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |220/20/10    кВ|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |("Ткацкая")    |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|29.|ПС      "Сигма"| МВА  |  2x250  |  500  |2007 - |       |        | пир | 50,00  |        | 300,00 | 2x250  |2000,00 |          |1026,00 | 3376,00 |
|   |110/10      кВ,|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |перевод на  220|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ             |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|30.|Расширение   ПС| шт.  |   32    |       |2006 - |       |  0,36  |     |  0,30  |        | 86,00  |   16   |1055,34 |    16    | 300,00 | 1442,00 |
|   |220/110/10/6 кВ|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Бутырки"      |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |(новое КРУЭ)   |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|31.|ПС  220/10   кВ| МВА  |  2x80   |       |2008 - |       |        |     |        |   35   | 495,00 |        |1885,00 |   2x80   | 520,00 | 2900,00 |
|   |"Автозаводская"|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|32.|ПС     "Пресня"| МВА  |  2x250  |  300  |2008 - |       |        |     |        |        | 100,00 | 2х250  |  1200  |          |        | 1300,00 |
|   |220/110/10 кВ  |      |  2x100  |       | 2009  |       |        |     |        |        |        | 2x100  |--------|          |        |---------|
|   |               |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |  1300  |          |        | 1300,00 |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|33.|ПС  "Владыкино"| МВА  |  2x80   |  34   |2009 - |       |        |     |        |        |        |  пир   | 97,50  |   2x80   |1825,50 | 1950,00 |
|   |220/10 кВ      |      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|34.|ПС     "Чоботы"|  кВ  |   16    |       |2010 - |       |        |     |        |        |        |        |        |   пир    | 320,00 | 320,00  |
|   |220/110/10     |      |         |       | 2012  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|35.|ПС             |  кВ  |   16    |       |2009 - |       |        |     |        |        |        |  пир   | 85,00  |          |1500,00 | 1585,00 |
|   |"Гражданская"  |      |         |       | 2011  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |220/110/10     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|36.|ПС  "Баскаково"| МВА  |  2x250  |  100  |2010 - |       |        |     |        |        |        |        |        |   пир    | 105,00 | 105,00  |
|   |220/110/10 кВ  |      |         |       | 2012  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|37.|ПС   "Сабурово"| МВА  |  2x250  |  101  |2010 - |       |        |     |        |        |        |        |        |   пир    | 105,00 | 105,00  |
|   |220/110/10 кВ  |      |         |       | 2012  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|38.|ПС   "Свиблово"| шт.  |    9    |       |2009 - |       |        |     |        |        |        |  пир   | 45,50  |          | 800,00 | 845,50  |
|   |220/110/10 кВ  |      |         |       | 2011  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|39.|ПС     "Чистая"| МВА  |  2x40   |  80   |2008 - |       |        |     |        |        |  7,00  |  2x40  | 990,26 |          |        | 997,26  |
|   |110/10/6 кВ    |      |         |       | 2009  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|40.|ПС  "Алабушево"| МВА  |  1 х40  |  15   | 2010  |       |        |     |        |        |        |  пир   | 30,00  |   1x40   | 52,81  |  82,81  |
|   |110/10 кВ      |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|41.|ПС    "Рижская"| МВА  |  2x80   |  34   |2008 - |       |        |     |        |  пир   | 50,00  |  2x80  | 229,34 |          |        | 279,34  |
|   |110/10 кВ      |      |         |       | 2009  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|42.|ПС  "Черкизово"| МВА  |  2x80   |  32   |2008 - |       |        |     |        |  пир   | 100,00 |        | 520,00 |   2x80   | 829,89 | 1449,89 |
|   |110/10/6 кВ    |      |  2x16   |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |  2х 16   |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|43.|ПС      "Южная"| МВА  |  2x250  |  100  |2009 - |       |        |     |        |        |        |  пир   | 250,00 |  2x250   |2250,00 | 2500,00 |
|   |220/110/10 кВ  |      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|44.|ПС       "Фили"| МВА  |  3x80   |  51   |2009 - |       |        |     |        |        |        |  пир   | 70,00  |          |1200,00 | 1270,00 |
|   |110/10/6 кВ    |      |         |       | 2011  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|45.|ПС   "Мазилово"| МВА  |  2x63   |  46   |2009 - |       |        |     |        |        |        |  пир   | 70,00  |          | 900,00 | 970,00  |
|   |110/10/6 кВ    |      |         |       | 2011  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|46.|ПС    "Коптево"| МВА  |  1x63   |  23   |2009 - |       |        |     |        |        |        |  пир   | 62,50  |          | 400,00 | 462,50  |
|   |110/10/6 кВ    |      |         |       | 2011  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|47.|ПС "Ломоносово"| МВА  |  2x80   |  57   |2009 - |       |        |     |        |        |        |  пир   | 65,00  |   2x80   | 718,42 | 783,42  |
|   |110/10 кВ      |      |         |       | 2011  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|48.|ПС   "Солнцево"| МВА  |  2x63   |  46   |2009 - |       |        |     |        |        |        |  пир   | 200,00 |   2x63   |1000,00 | 1200,00 |
|   |110/10/6 кВ    |      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|49.|ПС   "Бирюлево"| МВА  |  2x80   |  34   |2009 - |       |        |     |        |        |        |  пир   | 200,00 |   2x80   |1100,00 | 1300,00 |
|   |110/10/6 кВ    |      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|50.|ПС  "Гольяново"| МВА  |  2x80   |  34   |2009 - |       |        |     |        |        |        |  пир   | 65,00  |   2x80   |1000,00 | 1065,00 |
|   |220/10 кВ      |      |         |       | 2011  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|51.|ПС             | МВА  |  2x80   |  34   |2009 - |       |        |     |        |        |        |  пир   | 40,25  |          | 567,63 | 607,88  |
|   |"Метростроевс- |      |         |       | 2011  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кая"   110/10/6|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ             |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|52.|ПС  "Прожектор"| МВА  |  2x80   |  34   |2009 - |       |        |     |        |        |        |  пир   | 30,75  |          | 399,75 | 430,50  |
|   |110/10 кВ      |      |         |       | 2011  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|53.|ПС             | МВА  |  2x80   |  34   |2009 - |       |        |     |        |        |        |  пир   | 30,00  |          | 390,00 | 420,00  |
|   |"Электрозаводс-|      |         |       | 2011  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кая"   110/10/6|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ             |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|54.|ПС   "Кожухово"| МВА  |   11    |       |2008 - |       |        |     |  5,58  |        | 86,76  |        | 500,00 |    11    | 567,24 | 1159,58 |
|   |110/10/6 кВ    |      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|55.|ВЛ-110       кВ|  км  |  18,5   |       |2008 - |       |        |     |        |  пир   | 13,50  |        | 135,00 |   18,5   | 121,50 | 270,00  |
|   |"Ясенево      -|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Профсоюзная,   |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Ясенево - Битца|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |с     отпайкой,|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Битца         -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Бирюлево"      |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|56.|ПС             | шт.  |    5    |       |2009 - |       |        |     |        |        |        |  пир   | 50,00  |    5     | 450,00 | 500,00  |
|   |"Центральная"  |      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |220/110 кВ     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|57.|ПС "Н. Кунцево"| шт.  |   10    |       |2009 - |       |        |     |        |        |        |  пир   | 53,00  |    10    | 477,00 | 530,00  |
|   |110/10/6 кВ    |      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|   |Итого        по| МВА  |  9058   |4091,00|       |  839  |3853,57 | 32  |4985,93 |  1913  |9098,25 |  2332  |14320,93|   2258   |21265,21|53523,90 |
|   |реконструкции  |------+---------+-------|       |-------|        |-----|        |--------|        |--------|        |----------|        |         |
|   |               |  км  |  82,7   | 0,00  |       |   7   |        | 29  |        |  38,5  |        |  0,00  |        |   18,5   |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   Кабельные линии                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Увеличение     |      |         |       | 2006  |       | 26,03  |     |        |        |        |        |        |          |        |  26,03  |
|   |пропускной     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |способности    |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |КЛ-220       кВ|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Неглинная"  до|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |1000 А         |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
| 2 |Реконструкция  |  км  |  1x2,5  |       |2006 - | 1x2,5 | 121,97 |     | 317,01 | 2x2,8  | 6,025  |        |        |          |        | 445,00  |
|   |заходов  КЛ-110|      |  2x2,8  |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ         к ПС|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Угреша"       |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|3. |Реконструкция  |  км  |  1x3,9  |       |2006 - |1х1,39 | 332,00 |     | 127,00 |        |        |        |        |          |        | 459,00  |
|   |КВЛ-220      кВ|      |         |       | 2007  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Бутырская"  от|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |ПП-206  до   ПС|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Бескудниково" |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |до 1200 А      |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|4. |Реконструкция  |  км  |  2х1,1  |       |2006 - | 2x1,1 | 160,00 |     | 132,00 |        |        |        |        |          |        | 292,00  |
|   |кабельных      |      |         |       | 2007  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |участков       |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |КВЛ-220      кВ|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Очаково      -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Пресня 1  и  2"|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |от ПС "Очаково"|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |до     ПП-204 с|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |увеличением    |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |пропускной     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |способности  до|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |1000       А по|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |каждой цепи    |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|5. |Реконструкция  |  км  |  2x4,7  |       |2007 - |       |        |     | 47,50  |        | 142,50 |        | 810,00 |  2x4,7   | 800,00 | 1800,00 |
|   |кабельных      |      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |участков       |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |КВЛ-220      кВ|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Матвеевская  -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Пресня 1  и  2"|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |от ПП-203 до ПС|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Пресня"      с|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |увеличением    |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |пропускной     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |способности  до|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |1000       А по|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |каждой цепи    |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|6. |Увеличение     |  км  |  1х4,8  |       |2006 - |       |2021,04 |1x4,8|3562,00 |        | 95,00  |        |        |          |        | 5678,04 |
|   |пропускной     |      |  1х4,8  |       | 2007  |       |        |1x4,8|        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |способности    |      |  2x3,9  |       |       |       |        |2x3,9|        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |КЛ-110  кВ  "Н.|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Братцево      -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Войковская"   и|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Войковская   -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Свобода" до 600|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |А, "Гражданская|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |- Войковская  1|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |и 2" до 800 А  |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|7. |Увеличение     |  км  |  2x2,8  |       |2006 - | 2x2,8 | 416,00 |     | 123,00 |        |        |        |        |          |        | 539,00  |
|   |пропускной     |      |         |       | 2007  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |способности    |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |КЛ-110       кВ|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Елоховская   -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Рижская 1 и  2"|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |до 800 А       |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|8. |Кабельные      |  км  |   2x1   |   1   |2007 - |       |        | 2x1 | 272,94 |        | 47,06  |        |  0,00  |    0     |  0,00  | 320,00  |
|   |заходы  220  кВ|      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Очаково      -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Чоботы 2" на ПС|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Говорово"     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|9. |КЛ-220       кВ|  км  |   2x8   |   8   |2007 - |       |        |     |        |  2x8   |1870,71 |        |        |          |        | 1870,71 |
|   |ТЭЦ-21         |      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Ново-Братцево |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |1, 2"          |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|10.|Реконструкция  |  км  |  2x2,7  |       |2006 - |       | 12,83  |     | 21,87  | 2x2,7  | 735,00 |        | 20,19  |          |        | 789,89  |
|   |КЛ "Центральная|      |         |       | 2009  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |- Маяковская  1|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |и          2" с|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |увеличением    |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |пропускной     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |способности  до|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |1000   А   (для|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |включения    ПС|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"СИТИ-2")      |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|11.|Реконструкция  |  км  |   2x3   |       |2006 - |       |        |     |        |  2x3   |1898,32 |        |        |          |        | 1898,32 |
|   |КЛ-110       кВ|      |         |       | 2009  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"ТЭЦ-23       -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Метростроевская|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |1,   2"    (для|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |включения    ПС|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Сокольники")  |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|12.|КВЛ-110      кВ|  км  |  2x3,9  |       |2006 - |       |        |     |        | 2x3,9  | 812,89 |        |        |          |        | 812,89  |
|   |"Очаково      -|      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Мазилово 1, 2" |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|13.|КВЛ-110      кВ|  км  |  2x7,2  |       |2006 - |       |        |     |        | 2x7,2  |1605,48 |        |        |          |        | 1605,48 |
|   |"Мазилово     -|      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Крылатское   1,|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |2"             |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|14.|КВЛ-110 кВ  "Н.|  км  |  2x6,8  |       |2006 - |       |        |     |        | 2x6,8  |1248,49 |        |        |          |        | 1248,49 |
|   |Кунцево       -|      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Сетунь 1, 2"   |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|15.|КВЛ-110      кВ|  км  |  2x8,3  |       |2006 - |       |        |     |        | 2x8,3  |1488,30 |        |        |          |        | 1488,30 |
|   |"Рублево      -|      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Сетунь 1,2"    |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|16.|Реконструкция  |  км  |  2x6,2  |       |2006 - |       |        |     |        | 2x6,2  |1350,00 |        |        |          |        | 1350,00 |
|   |КЛ-110       кВ|      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Карачарово   -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Выхино"        |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|17.|Реконструкция  |  км  | 1х0,25  | 0,25  |2006 - |  пир  |  0,69  |     | 16,51  |        | 15,00  | 1х0,25 | 251,80 |          |        | 284,00  |
|   |КЛ-110       кВ|      |         |       | 2009  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"ТЭЦ-12       -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Маяковская   1,|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |2",     "Сити -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Никитская 1,2" |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|18.|Реконструкция с|  км  | 2х2,83  |       |2007 - |       |        | пир | 46,80  |        | 400,00 | 2x2,83 | 334,26 |          |        | 781,08  |
|   |увеличением    |      |         |       | 2009  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |пропускной     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |способности    |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |КВЛ-110      кВ|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"ТЭЦ-20       -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Черемушки 1,2" |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|19.|Реконструкция  |  км  |  2x3,4  |       |2008 - |       |        |     |  0,05  |  пир   | 110,00 | 2x3,4  | 777,63 |          | 212,32 | 1100,00 |
|   |КЛ-110       кВ|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Стромынка    -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Сокольники   1,|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |2"             |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|20.|Реконструкция  |  км  |  1x2,5  |       |2006 - |       |  5,97  | пир | 22,29  | пир +  | 615,00 | 1х2,5  | 31,74  |          |        | 675,00  |
|   |кабельного     |      |         |       | 2009  |       |        |     |        |  смр   |        |        |        |          |        |         |
|   |участка КВЛ-220|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ    "Свиблово|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |-Бутырки"      |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|21.|Реконструкция  |  км  |  1x4,8  |       |2006 - |       |        |4,80 |        |  4,80  | 512,31 |        |        |          |        | 512,31  |
|   |кабельного     |      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |участка КВЛ-110|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ      "Угреша|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |-Сабурово"     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|22.|Кабельный      |  км  |   1х9   |   9   |2006 - |       |        | 1х9 |        |  1x9   |1444,87 |        |        |          |        | 1444,87 |
|   |участок КВЛ-220|      |         |       | 2008  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ  "ТЭЦ-27   -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Бутырки"       |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|23.|Реконструкция с|  км  | 2х2,83  |       |2007 - |       |        | пир | 43,59  |        | 400,00 | 2x2,83 | 346,41 |          |        | 790,00  |
|   |увеличением    |      | 2x3,345 |       | 2009  |       |        |     |        |        |        |2x3,345 |        |          |        |         |
|   |пропускной     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |способности    |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кабельного     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |участка КВЛ-110|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ "Черемушки -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Южная 1, 2"  от|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |ПС  "Черемушки"|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |до ПП-27       |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|24.|Кабельные      |  км  |   4x9   |  18   |2007 - |       |        | пир | 63,38  |        | 510,22 |  2x9   |1607,55 |   2x9    | 818,85 | 3000,00 |
|   |заходы  220  кВ|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Омега        -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Радищево 1,  2"|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |на ПС "Сигма"  |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|25.|Строительство  |  км  |   2x5   |       |2008 - |       |        |     |        |  2x5   |1195,00 |        |        |          |        | 1195,00 |
|   |КЛ-110       кВ|      |         |       | 2009  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"ТЭЦ-20       -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Семеновская"   |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|26.|Кабельные      |  км  |  4x1,5  |   3   |2008 - |       |        |     |        |        | 70,00  | 4х 1,5 | 830,00 |          |        | 900,00  |
|   |заходы   ВЛ-220|      |         |       | 2009  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ "Борисовская|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |1"            и|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Чагинская"  на|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |ПС        "Н. -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Гоголевой      |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |("Орешково")   |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |220/110/20/10  |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ             |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|27.|Перекладка     |  км  |  1x1,7  |       |2007 - |       |        | пир | 24,80  |        | 190,00 | 1х1,7  | 325,20 |          |        | 540,00  |
|   |КЛ-110       кВ|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Софийская"    |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |(для  включения|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |ПС             |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Берсеньевская"|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |)              |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|28.|КЛ-220       кВ|  км  |   2x3   |   3   |2007 - |       |        | пир |  1,67  |        | 90,00  |  2x3   | 808,33 |          |        | 900,00  |
|   |"Белорусская  -|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Сити-2 1, 2"   |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|29.|КЛ-220       кВ|  км  |   2x7   |   7   |2007 - |       |        | пир |  9,99  |        | 142,00 |        |1000,00 |   2x7    | 948,01 | 2100,00 |
|   |"Бутырки      -|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Белорусская  1,|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |2"             |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|30.|Кабельные      |  км  |   4x3   |   6   |2008 - |       |        |     |        |        | 300,00 |  4x3   |1500,00 |          |        | 1800,00 |
|   |заходы   ВЛ-220|      |         |       | 2009  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ  "ТЭЦ-26   -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Боброво  1"   и|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"ТЭЦ-26       -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Ясенево" на  ПС|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Бутово"       |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |220/110/20/10  |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ            с|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |реконструкцией |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |ПС "Ясенево"   |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|31.|Заходы   КЛ-110|  км  |  4x2,5  |   5   |2007 - |       |        | пир | 38,77  |        | 190,00 | 4x2,5  |2411,23 |          |        | 2640,00 |
|   |кВ  "ТЭЦ-12   -|      |         |       | 2009  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Очаково" на  ПС|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"МГУ"          |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|32.|КЛ-110       кВ|  км  |   2x4   |   4   |2007 - |       |        |     |  1,02  |        | 75,00  |  2x4   |1278,98 |          |        | 1355,00 |
|   |"Бутово       -|      |         |       | 2009  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Гавриково 1,2" |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|33.|Реконструкция  |  км  |  2x1,6  |       |2008 - |       |        |     |        |  пир   | 50,00  | 2x1,6  | 440,00 |          |        | 490,00  |
|   |КЛ-110       кВ|      |         |       | 2009  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Угреша  -   Н.|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Спасская 1, 2" |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|34.|Увеличение     |  км  |  2x6,7  |       |2009 - |       |        |     |        |  пир   | 50,00  |        | 800,00 |  2x6,7   |1070,00 | 1920,00 |
|   |пропускной     |      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |способности    |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |КЛ-110       кВ|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Динамо        |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |-Гражданская 1,|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |2" до 600 А    |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|35.|Реконструкция  |  км  |  2x6,4  |       |2008 - |       |        |     |        |  пир   | 85,00  |        | 870,00 |  2x6,4   | 965,00 | 1920,00 |
|   |ВЛ-110       кВ|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Очаково      -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Вернадская   А,|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Б"             |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|36.|Увеличение     |  км  |  2x6,9  |       |2007 - |       |        | пир | 62,00  |        | 90,00  | 2x6,9  |1018,00 |          |1000,00 | 2170,00 |
|   |пропускной     |      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |способности    |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |КЛ-110       кВ|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Сити-1       -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Маяковская"    |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|37.|КЛ-220       кВ|  км  |   2x6   |   6   |2008 - |       |        |     |        |  пир   | 50,00  |        | 800,00 |   2x6    | 950,00 | 1800,00 |
|   |"Южная        -|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Автозаводская  |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |1,2"           |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|38.|КЛ-220       кВ|  км  |   2x5   |   5   |2008 - |       |        |     |        |  пир   | 75,00  |        | 750,00 |   2x5    | 675,00 | 1500,00 |
|   |"ТЭЦ-20       -|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Кожевническая  |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |1,2"           |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|39.|Перекладка     |  км  |  2x4,9  |       |2007 - |       |        | пир | 31,20  |        | 970,00 |        | 700,00 |  2х4,9   |1096,80 | 2800,00 |
|   |КЛ-110       кВ|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Фрунзенская 1,|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |2"             |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|40.|Перекладка     |  км  | 1х4,21  |       |2007 - |       |        | пир | 28,00  |        | 800,00 |        | 800,00 |  1х4,21  |1482,00 | 3110,00 |
|   |КЛ-110 кВ  "ГЭС|      |  1х5,5  |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |  1x5,5   |        |         |
|   |-    Павелецкая|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |1,2"           |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|41.|Реконструкция  |  км  |  2x0,7  |       |2008 - |       |        |     |        |  пир   | 10,50  |        | 105,00 |  2x0,7   | 94,50  | 210,00  |
|   |КЛ-110       кВ|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Елоховская   -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Андроньевская  |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |1, 2" (ПС 396 -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |коллектор 13)  |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|42.|КЛ-110       кВ|  км  |  2x3,5  |       |2008 - |       |        |     |        |  пир   | 40,00  |        | 210,00 |  2x3,5   | 800,00 | 1050,00 |
|   |"Елоховская   -|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Лефортово 1, 2"|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |(ПС       780 -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |коллектор 1)   |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|43.|Реконструкция  |  км  | 1х0,15  |       |2008 - |       |        |     | 47,00  |        | 50,00  |  0,15  | 503,00 |          |        | 800,00  |
|   |кабельного     |      |         |       | 2009  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |участка КВЛ-220|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ "Свиблово  -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Владыкино"   от|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |ПС  "Владыкино"|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |до ПП-206      |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|44.|КВЛ-220      кВ|  км  |   1х4   |       |2008 - |       |        |     |        |  пир   | 50,50  |        | 505,00 |   1х4    | 854,50 | 1410,00 |
|   |"Бескудниково  |      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |-Владыкино"    |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|45.|КЛ-110       кВ|  км  | 2x1,24  |       |2008 - |       |        |     |        |        | 60,00  | 2х1,24 | 212,00 |          | 100,00 | 372,00  |
|   |"Пресня -  Фили|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |1,2"           |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|46.|КЛ-220       кВ|  км  |  1х2,5  |       |2008 - |       |        |     |        |  пир   | 63,00  |        | 630,00 |  1х2,5   | 167,00 | 860,00  |
|   |"Владыкино    -|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Бутырки"       |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|47.|Перекладка  КВЛ|  км  |  2x3,4  |       |2006 - |       |        | пир | 21,16  |        | 40,00  | 2x3,4  |1138,84 |          |        | 1200,00 |
|   |в кабель КЛ-110|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ "Восточная -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Черкизово 1, 2"|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|48.|КВЛ-110      кВ|  км  | 2х7,72  |       |2008 - |       |        |     |        |        | 20,00  |        | 150,00 |  2х7,72  | 40,00  | 210,00  |
|   |"Чагино       -|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Донецкая 1,  2"|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |(увеличение    |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |пропускной     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |способности)   |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |для          ПС|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Шипиловская"  |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|49.|КЛ-110       кВ|  км  | 2x0,65  |       |2008 - |       |        |     |        |        | 20,00  |        | 105,00 |  2х0,65  | 70,00  | 195,00  |
|   |"Донецкая     -|      |         |       | 2010  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Ленинская 1, 2"|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |(увеличение    |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |пропускной     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |способности)   |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |для          ПС|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Шипиловская"  |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|50.|КЛ-110       кВ|  км  |   2x5   |       |2008 - |       |        |     |        |  пир   | 50,00  |        | 100,00 |   2x5    | 350,00 | 500,00  |
|   |"Вернадская   -|      |         |       | 2011  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Семеновская  1,|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |2"             |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|51.|Кабельные      |  км  |  2x5,5  |  5,5  |2006 - |       |        |     | 81,85  |        | 100,00 | 2x5,5  |1319,72 |          |        | 1501,57 |
|   |заходы   ВЛ-220|      |         |       | 2009  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |кВ  "ТЭЦ-27   -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Бескудниково"  |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |на           ПС|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"Бабушкин"     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|52.|Реконструкция  |  км  |  2x6,5  |       |2008 - |       |        |     |        |        | 32,00  |        | 500,00 |  2x6,5   |1431,60 | 1963,60 |
|   |КВЛ-110      кВ|      |         |       | 2011  |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |"ТЭЦ-12       -|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |Очаково 1, 2" с|      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|   |отпайкой       |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|   |Итого        по| МВА  |    0    | 0,00  |       | 0,00  |3096,53 |0,00 |5143,39 |  0,00  |20265,17|  0,00  |23989,90|   0,00   |13927,58|66422,58 |
|   |кабельным      |------+---------+-------+-------+-------|        |-----|        |--------|        |--------|        |----------|        |         |
|   |линиям         |  км  | 246,98  | 80,75 |       | 7,79  |        |28,30|        | 67,70  |        | 63,15  |        |  87,38   |        |         |
|---+---------------+------+---------+-------+-------+-------+--------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+---------|
|   |Итого        по| МВА  |  12324  | 7357  |       |  965  |8586,32 | 532 |12088,85|  2413  |35393,53|  2992  |42012,96|   3738   |43433,66|141515,32|
|   |объектам 2006 -|------+---------+-------+-------+-------|        |-----|        |--------|        |--------|        |----------|        |         |
|   |2010  годов,  в|  км  | 369,68  | 88,75 |       | 14,79 |        | 82  |        | 121,20 |        | 63,15  |        |  105,88  |        |         |
|   |том числе:     |      |         |       |       |       |        |     |        |        |        |        |        |          |        |         |
|---+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|   |ПС "Руднево-1",|                                                                                                                        | 1293,92 |
|   |договор        |                                                                                                                        |         |
|   |N 322/1763 от 2|                                                                                                                        |         |
|   |сентября   2005|                                                                                                                        |         |
|   |года           |                                                                                                                        |         |
|---+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|   |ПС "Пресня" 220|                                                                                                                        | 1300,00 |
|   |кВ             |                                                                                                                        |         |
|---+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|   |за         счет|                                                                                                                        |138921,40|
|   |источника      |                                                                                                                        |         |
|   |финансирования |                                                                                                                        |         |
|   |-  прибыль   по|                                                                                                                        |         |
|   |тарифу       на|                                                                                                                        |         |
|   |присоединение  |                                                                                                                        |         |
|---+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|
|   |Всего        по| МВА  |  12324  | 7357  |                                                                                               |146006,03|
|   |объектам 2006 -|------+---------+-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|         |
|   |2012 годов     |  км  |   370   |  89   |                                                                                               |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
                                                                                                                                                ".

     5. Приложение 4 к Закону изложить в следующей редакции:

                                                                                          "Приложение 4
                                                                                 к Закону города Москвы
                                                                               от 5 июля 2006 года N 33

 Инвестиционная программа ОАО "Объединенная энергетическая компания" по строительству трансформаторных
                        электроподстанций и линий электропередачи 110 - 220 кВ

                                                                                          (млн. рублей)

+--------------------------------------------------------------------------------------------------N
| N |   Наименование   |  Ед.  |Проект,| Сроки |Ориентирово-|2007 год |2008 год|2009 год |2010 год |
|п/п|     объекта      | изм.  | мощ-  |строи- |чная сметная|         |        |         |         |
|   |                  |       | ность |тельст-| стоимость* |         |        |         |         |
|   |                  |       |       |  ва   |            |         |        |         |         |
|---+------------------+-------+-------+-------+------------+---------+--------+---------+---------|
|1. |ПС          220 кВ|  МВА  | 2x100 |2005 - |  1852,54   | 254,24  |        |         |         |
|   |"Заболотье"      с|       |       | 2007  |            |         |        |         |         |
|   |заходами ВЛ-220 кВ|  км   | 2x0,5 |       |            |         |        |         |         |
|---+------------------+-------+-------+-------+------------+---------+--------+---------+---------|
|2. |ПС          220 кВ|  МВА  | 3x100 |2005 - |    1550    | 254,24  |        |         |         |
|   |"Матвеевская"     |       |       | 2008  |            |         |        |         |         |
|   |("Давыдковская") с|  км   |4x0,15 |       |            |         |        |         |         |
|   |заходами КЛ-220 кВ|       |       |       |            |         |        |         |         |
|---+------------------+-------+-------+-------+------------+---------+--------+---------+---------|
|3. |ПС          220 кВ|  МВА  | 2x200 |2006 - |  5019,69   | 1476,18 |        |         |         |
|   |"Ново-Внуково"   с|       |       | 2008  |            |         |        |         |         |
|   |заходами   КВЛ-220|  км   |  4x7  |(I кв.)|            |         |        |         |         |
|   |кВ                |       |       |       |            |         |        |         |         |
|---+------------------+-------+-------+-------+------------+---------+--------+---------+---------|
|4. |ПС     "Герцево" с|  МВА  | 2x250 |2006 - |  3446,61   | 550,85  |        |         |         |
|   |заходами ЛЭП 110 -|       |       | 2008  |            |         |        |         |         |
|   |220 кВ            |  км   | 2x100 |       |            |         |        |         |         |
|   |                  |       |       |       |            |         |        |         |         |
|   |                  |       | 6,85  |       |            |         |        |         |         |
|---+------------------+-------+-------+-------+------------+---------+--------+---------+---------|
|5. |ПС          220 кВ|  МВА  | 2x63  |2005 - |  3527,12   | 1572,03 |        |         |         |
|   |"Дубининская"    с|       |       | 2007  |            |         |        |         |         |
|   |заходами КЛ-220 кВ|  км   | 2x4,8 |       |            |         |        |         |         |
|---+------------------+-------+-------+-------+------------+---------+--------+---------+---------|
|6. |ПС 220 кВ "Сити-2"|  МВА  | 2x200 |2005 - |  7220,34   | 2372,88 |3813,56 |         |         |
|   |с заходами  КЛ-220|       |       | 2008  |            |         |        |         |         |
|   |кВ      "Очаково -|  км   | 3x100 |       |            |         |        |         |         |
|   |Сити-2 1, 2"      |       |       |       |            |         |        |         |         |
|   |                  |       | 5,12  |       |            |         |        |         |         |
|---+------------------+-------+-------+-------+------------+---------+--------+---------+---------|
|7. |ПС       220/20 кВ|  МВА  | 3x100 |2008 - |  2568,19   | 172,04  | 432,2  | 1963,95 |         |
|   |"Мневники"        |       |       | 2009  |            |         |        |         |         |
|   |------------------+-------+-------+-------+------------+---------+--------+---------+---------|
|   |Заходы КВЛ-220  кВ|  км   | 2x10  |2008 - |  2713,99   |         | 338,98 | 2087,72 | 287,29  |
|   |"Очаково         -|       |       | 2009  |            |         |        |         |         |
|   |Мневники 1, 2"    |       |       |       |            |         |        |         |         |
|---+------------------+-------+-------+-------+------------+---------+--------+---------+---------|
|8. |ПС       220/20 кВ|  МВА  | 3x100 |2008 - |  3066,95   |         | 194,92 | 2560,17 | 311,86  |
|   |"Ново-Измайлово"  |       |       | 2010  |            |         |        |         |         |
|   |("Абрамово")      |       |       |       |            |         |        |         |         |
|   |------------------+-------+-------+-------+------------+---------+--------+---------+---------|
|   |Заходы  КЛ-220  кВ|  км   | 2x10  |2008 - |    3000    |         | 25,42  | 2288,14 | 686,44  |
|   |"Восточная  -   Н.|       |       | 2010  |            |         |        |         |         |
|   |Измайловская 1, 2"|       |       |       |            |         |        |         |         |
|---+------------------+-------+-------+-------+------------+---------+--------+---------+---------|
|9. |Новая ПС 220/20 кВ|  МВА  | 3x100 |2008 - |    1000    |         |        |   500   |   500   |
|   |в   ЦАО    (Арбат,|       |       | 2010  |            |         |        |         |         |
|   |Тверской,         |       |       |       |            |         |        |         |         |
|   |Хамовники)        |       |       |       |            |         |        |         |         |
|----------------------+-------+-------+-------+------------+---------+--------+---------+---------|
|Итого                 |МВА км | 3326  |       |  34965,43  | 6652,46 |4805,08 | 9399,98 | 1785,59 |
|                      |       |       |       |            |         |        |         |         |
|                      |       |111,05 |       |            |         |        |         |         |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

______________________________
     * Стоимость и сроки строительства будут уточняться  при   разработке
проектно-сметной документации.".

     6. Приложение 5 к Закону изложить в следующей редакции:

                                                            "Приложение 5
                                                   к Закону города Москвы
                                                 от 5 июля 2006 года N 33

                                                  Инвестиционная программа ОАО "Энергокомплекс"
                             по строительству трансформаторных электроподстанций и линий электропередачи 110 - 220 кВ

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
|   Наименование    | Ед. |Проек-| Срок |2006 - 2007 годы |    2008 год    |     2009 год     |    2010 год    |Ориентиро-|
|      объекта      |изм. | тная |ввода |-----------------+----------------+------------------+----------------|  вочная  |
|                   |     | мощ- |      |мощность | цены, | мощ-  | цены,  | мощ- |цены, млн. | мощ- |  цены,  |стоимость |
|                   |     |ность |      |         | млн.  | ность |  млн.  |ность |  рублей   |ность |  млн.   |объекта*, |
|                   |     |      |      |         |рублей |       | рублей |      |           |      | рублей  |   млн.   |
|                   |     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |  рублей  |
|                   |     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |(без НДС) |
|-------------------+-----+------+------+---------+-------+-------+--------+------+-----------+------+---------+----------|
|ПС ПО кВ  "Грач"  с| МВА | 2x80 |2006 -|  2x80   |1077,15|       | 516,07 |      |           |      |         |1593,22** |
|заходами ВЛ-110  кВ|     |      | 2007 |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|"Пахра - Сырцово"  | км  |2х0,07|      | 2х0,075 |       |       |        |      |           |      |         |          |
|                   |     |  5   |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|-------------------+-----+------+------+---------+-------+-------+--------+------+-----------+------+---------+----------|
|Заходы  КЛ-110   кВ| км  |2x7,5 |2007 -|         |       | 2x7,5 |1683,05 |      |           |      |         |1683,05** |
|"Грач - Бутово"    |     |      | 2008 |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|-------------------+-----+------+------+---------+-------+-------+--------+------+-----------+------+---------+----------|
|ПС 220 кВ "Марфино"| МВА |3x100 |2006 -|         |1972,81| 3х100 |1730,58 |      |           |      |         |3703,39** |
|с заходами  КВЛ-220|     |      | 2008 |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|кВ       "Бутырки -| км  |2х0,32|      |         |       |2х0,32 |        |      |           |      |         |          |
|Свиблово",         |     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|"Свиблово         -| км  |2x3,5 |      |         |       | 2x3,5 |        |      |           |      |         |          |
|Владыкино"         |     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|-------------------+-----+------+------+---------+-------+-------+--------+------+-----------+------+---------+----------|
|ПС 220 кВ "Яшино" с| МВА |2х 100|2006 -|         |1457,67|2х 100 |1171,14 |      |           |      |         |2628,81** |
|заходами КВЛ-220 кВ|     |      | 2008 |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|"Герцево          -| км  |2x1,2 |      |         |       | 2x1,2 |        |      |           |      |         |          |
|Центральная"       |     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|-------------------+-----+------+------+---------+-------+-------+--------+------+-----------+------+---------+----------|
|Заходы  КЛ-220   кВ| км  |2x2,3 |2007 -|         |       |       | 338,98 |2x2,3 |  278,81   |      |         | 617,80** |
|"Ново-Братцево    -|     |      | 2009 |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|Яшино"             |     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|-------------------+-----+------+------+---------+-------+-------+--------+------+-----------+------+---------+----------|
|ПС           220 кВ| МВА |4x100 |2006 -|         |1627,84| 4x100 |3907,75 |      |           |      |         |5535,59** |
|"Никулино"        с|     |      | 2008 |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|заходами КЛ-220  кВ| км  |2x6,2 |      |         |       | 2x6,2 |        |      |           |      |         |          |
|на ПС "Очаково"    |     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|-------------------+-----+------+------+---------+-------+-------+--------+------+-----------+------+---------+----------|
|ПС 220 кВ "Перерва"| МВА |2x100 |2006 -|         | 5,48  | 2x100 |3628,42 |      |           |      |         |3633,90** |
|с заходами  КВЛ-220|     |      | 2008 |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|кВ      "Сабурово -| км  |2x3,5 |      |         |       | 2x3,5 |        |      |           |      |         |          |
|Баскаково"         |     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|-------------------+-----+------+------+---------+-------+-------+--------+------+-----------+------+---------+----------|
|ПС           220 кВ| МВА |3x100 |2006 -|         | 5,25  | 3х100 |4562,54 |      |           |      |         |4567,80** |
|"Первомайская"    с|     |      | 2008 |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|заходами КВЛ-220 кВ| км  | 2x2  |      |         |       |  2x2  |        |      |           |      |         |          |
|"Баскаково        -|     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|Гольяново",        |     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|"Гольяново        -|     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|Восточая"          |     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|-------------------+-----+------+------+---------+-------+-------+--------+------+-----------+------+---------+----------|
|ПС           110 кВ| МВА | 2x80 |2006 -|         |699,32 | 2x80  |1798,98 |      |           |      |         |2498,31** |
|"Ново-Орехово"     |     |      | 2008 |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|("Шипиловская")   с| км  | 2x3  |      |         |       |  2x3  |        |      |           |      |         |          |
|заходами КЛ-110  кВ|     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|"Борисово         -|     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|Шипиловская"       |     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|-------------------+-----+------+------+---------+-------+-------+--------+------+-----------+------+---------+----------|
|ПС           220 кВ| МВА |3х100 |2006 -|         |1559,07|       |1884,49 |3x100 |  2594,58  |      |         |6038,14** |
|"Мещанская"       с|     |      | 2009 |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|заходами КЛ-220  кВ| км  |2х1,5 |      |         |       |       |        |2х1,5 |           |      |         |          |
|"Бутырки          -|     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|Красносельская   1,| км  | 2x6  |      |         |       |       |        | 2x6  |           |      |         |          |
|2"                 |     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|-------------------+-----+------+------+---------+-------+-------+--------+------+-----------+------+---------+----------|
|ПС "Ново-Кузьминки"| МВА |2х160 |2006 -|         | 5,31  |       | 2659,1 |2x160 |  4237,29  |      |         |6901,69** |
|с  заходами  КЛ-220|     |      | 2009 |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|кВ на ПС "Чагино", | км  | 2x5  |      |         |       |       |        | 2x5  |           |      |         |          |
|заходы  "Карачарово|     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|- Ново-Кузьминки"  | км  | 2x5  |      |         |       |       |        | 2x5  |           |      |         |          |
|-------------------+-----+------+------+---------+-------+-------+--------+------+-----------+------+---------+----------|
|ПС           220 кВ| МВА |3x160 |2006 -|         | 6,49  |       |7101,73 |3x160 |  5872,29  |      |         |12980,51**|
|"Ваганьковская"   с|     |      | 2009 |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|заходами КЛ-220  кВ| км  | 2x8  |      |         |       |       |        | 2x8  |           |      |         |          |
|к ПС  "Гражданская"|     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|и к ПС "Мневники"  | км  | 2х10 |      |         |       |       |        | 2x10 |           |      |         |          |
|-------------------+-----+------+------+---------+-------+-------+--------+------+-----------+------+---------+----------|
|ПС           220 кВ| МВА |3х160 |2006 -|         | 5,75  |       |  5450  |3x160 |  3850,18  |      |         |9305,93** |
|"Золотаревская"    |     |      | 2009 |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|("Хамовники")     с| км  | 2x5  |      |         |       |       |        | 2x5  |           |      |         |          |
|заходами КЛ-220  кВ|     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|"ТЭЦ-20           -| км  | 2x5  |      |         |       |       |        | 2x5  |           |      |         |          |
|Золотаревская",    |     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|заходы  "Пресня   -|     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|Золотаревская"     |     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|-------------------+-----+------+------+---------+-------+-------+--------+------+-----------+------+---------+----------|
|ПС           220 кВ| МВА |3x100 |2006 -|         | 4,87  |       | 2352,5 |3х 100|  5189,24  |      |         |7546,61** |
|"Красносельская"  с|     |      | 2009 |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|заходами КЛ-220  кВ| км  |2x12,5|      |         |       |       |        |2x12,5|           |      |         |          |
|к ТЭЦ-23           |     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|-------------------+-----+------+------+---------+-------+-------+--------+------+-----------+------+---------+----------|
|ПС      "Курская" с| МВА |2х160 |2006 -|         | 4,32  |       |3389,83 |2x160 |  4969,41  |      |         |8363,56** |
|заходами КЛ-220  кВ|     |      | 2009 |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|"Красносельская   -| км  | 2x4  |      |         |       |       |        | 2x4  |           |      |         |          |
|Курская  1,    2" и|     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|"Курская          -| км  | 2x5  |      |         |       |       |        | 2x5  |           |      |         |          |
|Кожевническая 1, 2"|     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|-------------------+-----+------+------+---------+-------+-------+--------+------+-----------+------+---------+----------|
|ПС           110 кВ| МВА | 2x80 |2006 -|         | 3,57  |       |  8,3   |      |  1117,8   | 2x80 | 1661,02 |2790,68** |
|"Зеленоградская"  с|     |      | 2010 |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|заходами ЛЭП       | км  | 2x2  |      |         |       |       |        |      |           | 2x2  |         |          |
|-------------------+-----+------+------+---------+-------+-------+--------+------+-----------+------+---------+----------|
|Итого    за    счет| МВА | 4080 |      |   160   |8434,91| 1560  |42183,47| 2200 | 28109,58  | 160  | 1661,02 |80388,98**|
|средств         ОАО|     |      |      |         |       |       |        |      |           |      |         |          |
|"Энергокомплекс"   | км  |197,19|      |  0,15   |       | 54,44 |        |138,6 |           |  4   |         |          |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

______________________________
     * Показатели уточняются при разработке проектно-сметной документации.
     ** Стоимость без учета компенсации затрат бюджета города Москвы за предоставление площадок под строительство инвестиционных объектов.".

     7. Приложение 6 к Закону изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                     "Приложение 6
                                                                                                                            к Закону города Москвы
                                                                                                                          от 5 июля 2006 года N 33

    Инвестиционная программа ОАО "Московская городская электросетевая компания" по строительству и реконструкции трансформаторных подстанций и
                                                 распределительных сетей с напряжением ниже 35 кВ

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
|Наименование| Ед.  |Проект-| Срок  |    2006 год    |    2007 год    |    2008 год    |    2009 год    |    2010 год    |    2011 год     |Ориенти- |
|  объекта   | изм. |  ная  | ввода |----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------|ровочная |
|            |      | мощ-  |       |протяже-| цены, |протяже-| цены, |протя- | цены,  |протя- | цены,  |протя- | цены,  |протяже-| цены,  |стоимость|
|            |      | ность |       |нность, | млн.  |нность, | млн.  | жен-  |  млн.  | жен-  |  млн.  | жен-  |  млн.  |нность, |  млн.  |объекта, |
|            |      |       |       |км/мощ- |рублей |км/мощ- |рублей |ность, | рублей |ность, | рублей |ность, | рублей |км/мощ- | рублей |  млн.   |
|            |      |       |       | ность, |       | ность, |       |км/мощ-|        |км/мощ-|        |км/мощ-|        | ность, |        | рублей  |
|            |      |       |       |  МВА   |       |  МВА   |       |ность, |        |ность, |        |ность, |        |  МВА   |        |         |
|            |      |       |       |        |       |        |       |  МВА  |        |  МВА  |        |  МВА  |        |        |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
|                                                                 Новое строительство                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Строительст-|  км  |245/10 | 2007  |  171/  | 1065  |   74   |348,79 |       |        |       |        |       |        |        |        |  0,00   |
|во  ПКЛ   по|      |       |       |  10,2  |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|городской   |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|программе   |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Строительст-|  км  | 121,5 |2007 - |        |       |   17   |431,00 |  105  | 246,81 |       |        |       |        |        |        | 246,81  |
|во КЛ       |      |       | 2011  |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Строительст-|      |  0,0  |2008 - |        | 7,60  |        | 55,10 |       | 270,23 |       | 505,55 |       | 431,66 |        |        | 1207,44 |
|во автобаз  |      |       | 2011  |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Строительст-|      |       | 2006  |        |248,08 |        |       |       | 318,27 |       |        |       |        |        |        | 318,27  |
|во         и|      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|реконструк- |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|ция         |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|телекоммуни-|      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|кационных   |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|центров   по|      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|районам     |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------|
|АИИС КУЭ    |      |       |2007 - |        | 32,00 |        |2000,00|       |3381,94 |       |3569,50 |       |2686,60 |        |        | 9638,04 |
|            |      |       | 2011  |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Оборудование|      |       | 2011  |        |257,94 |        |360,00 |       | 156,07 |       | 430,50 |       | 500,00 |        |        | 1704,51 |
|------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Прочие      |      |       |2006 - |        | 19,86 |        | 52,70 |       |  1,5   |       | 352,31 |       | 30,85  |        |        | 457,22  |
|объекты     |      |       | 2011  |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|электроэнер-|      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|гетики      |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Приобретение|  км  |235,10 |2006 - |   31   |112,12 |   35   |600,00 |  15   | 209,03 |       |        |  79   |1313,40 |        |        | 2234,55 |
|объектов    |      |       | 2011  |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|основных    |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|средств     |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Итого     по|      |       |       |202/10,2| 1743  |  126   |3847,59|  120  |  4584  |       |  4858  |  79   |  4963  |        |        |19994,41 |
|новому      |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|строительст-|      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|ву          |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
|                                                                    Реконструкция                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Воздушные   |  км  | 135,6 |2006 - | 10,20  | 16,46 |   45   | 47,50 | 30,40 | 51,83  | 2500  | 38,01  |  25   | 47,04  |        |        | 200,84  |
|линии       |      |       | 2011  |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Кабельные   |  км  | 664,4 |2006 - | 100,30 |173,59 |  117   |1010,00|138,10 | 709,40 | 15200 | 990,43 |  157  |1225,95 |        |        | 4109,37 |
|линии       |      |       | 2011  |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Машины     и| МВА  | 878,5 |2007 - | 146,50 |308,48 |  198   |690,00 |  130  | 436,45 | 20200 | 650,00 |  202  | 676,00 |        |        | 2760,93 |
|оборудование|      |       | 2011  |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|подстанций  |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Прочие      |      |       |2006 - |        | 53,33 |        |179,20 |       | 185,67 |       |        |       |        |        |        | 418,20  |
|объекты     |      |       | 2011  |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|электроэнер-|      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|гетики      |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------|
|ПИР      для|      |       |2007 - |        | 20,61 |        |185,00 |       | 100,00 |       | 340,00 |       | 100,00 |        |        | 745,61  |
|строительст-|      |       | 2011  |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|ва   будущих|      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|лет         |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Итого     по|      |       |       | 110,5/ |572,47 |  162/  |2111,70|168,5/ |1483,35 | 177/  |2018,44 | 182/  |2048,99 |        |        | 8234,95 |
|реконструк- |      |       |       | 146,5  |       |  198   |       |  130  |        |  202  |        |  202  |        |        |        |         |
|ции         |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Итого       |      |       |       |        |2315,07|        |5959,29|       |6067,20 |       | 6876,3 |       |7011,50 |        |        |28229,36 |
|сетевое     |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|хозяйство   |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Планируемое | км/  |9137,6/|2006 - | 744,6/ |1864,81|  357/  |3775,00| 677/  |7575,00 | 2197/ |24990,00|       |40515,00| 1911/  |26195,00|104914,81|
|выполнить   | МВА  |5134,6 | 2011  | 560,6  |       |  263   |       |  363  |        | 1179  |        |       |        |  1025  |        |         |
|МГЭК, в  том|      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|числе:      |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------|
|освоение    |      |       |       |        |       |        |2625,00|       |6975,00 |       |24890,00|       |40515,00|        |26195,00|101200,00|
|средств,    |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|полученных  |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|по тарифу   |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------|
|по договорам|      |       |       |        |309,07 |        |250,00 |       |        |       |        |       |        |        |        | 559,07  |
|о     снятии|      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|технологиче-|      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|ских        |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|ограничений |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------|
|по договорам|      |       |       |        |1555,74|        |900,00 |       | 600,00 |       | 100,00 |       |        |        |        | 3155,74 |
|о           |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|компенсации |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|потерь      |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Объемы      |      |       |2006 - |        |5311,94|        |7051,60|       |17720,00|       |36840,00|       |46640,00|        |        |113563,54|
|необходимого|      |       | 2011  |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|финансирова-|      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|ния         |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|------------+------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+---------|
|Всего      с| км/  |       |       | 1057/  |4179,88|645/ 461|9734,3 | 965/  |13642,20| 2374/ |31866,30| 3512/ |47526,50| 1911/  |26195,00|133144,17|
|технологиче-| МВД  |       |       | 717,3  |       |        |       |  493  |        | 1381  |        | 1946  |        |  1025  |        |         |
|ским        |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|присоедине- |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
|нием        |      |       |       |        |       |        |       |       |        |       |        |       |        |        |        |         |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
                                                                                                                                                ".

     8. Приложение 7 к Закону изложить в следующей редакции:

                                                                                          "Приложение 7
                                                                                 к Закону города Москвы
                                                                               от 5 июля 2006 года N 33

                              Инвестиционная программа ГУП "Москоллектор"
                                по строительству кабельных коллекторов

                                                                                          (млн. рублей)

+--------------------------------------------------------------------------------------------------N
| N  |    Наименование     |Протяжен- |   Сроки   |Стоимость |2007 год|2008 год|2009 год |2010 год |
|п/п |коллектора от центра |ность, км |строительс-|строитель-|        |        |         |         |
|    |       питания       |          |    тва    |   ства   |        |        |         |         |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
| 1. |ПС "Грач"            |   2,50   |2007 - 2008|  347,00  | 136,00 | 211,00 |         |         |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
| 2. |ПС "Руднево-1"       |   1,74   |2007 - 2008|  316,00  | 232,00 | 84,00  |         |         |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
| 3. |ПС "Яшино"           |   1,39   |2007 - 2008|  674,00  | 413,00 | 261,00 |         |         |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
| 4. |ПС "Марфино"         |   1,75   |2007 - 2008|  879,00  | 581,00 | 298,00 |         |         |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
| 5. |ПТУ "Строгино"       |   1,97   |2008 - 2009|  808,00  | 20,00  | 300,00 | 488,00  |         |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
| 6. |ГТЭС "Кожухово"      |   1,55   |2008 - 2009|  637,00  | 15,00  | 600,00 |  22,00  |         |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
| 7. |ГТЭС "Щербинка"      |   5,90   |2008 - 2009| 1 000,00 | 10,00  | 751,00 | 239,00  |         |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
| 8. |ГТЭС "Северный"      |   0,75   |2008 - 2009|  342,10  | 10,00  | 300,00 |  32,1   |         |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
| 9. |ГТЭС "Терешково"     |   1,75   |2008 - 2009|  969,00  | 15,00  | 500,00 | 454,00  |         |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|10. |ПС "Бескудниково"    |   2,50   |2008 - 2009| 1 027,00 |        | 350,00 | 677,00  |         |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|11. |ПС "Чагино"          |   1,50   |2008 - 2009|  617,00  |        | 400,00 | 217,00  |         |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|12. |ПС "Берсеньевская"   |   0,70   |2008 - 2009| 1 200,00 |        | 160,00 | 840,00  | 200,00  |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|13. |ПС "Ново-Братцево"   |   1,00   |2008 - 2009|  300,00  |        | 150,00 | 150,00  |         |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|14. |ПС "Перерва"         |   0,65   |2008 - 2009|  267,00  |  7,00  | 50,00  | 210,00  |         |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|15. |ТЭЦ-20               |   1,17   |2008 - 2009|  480,00  |  5,00  | 300,00 | 175,00  |         |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|16. |ГТЭС "Коломенское"   |   3,00   |2008 - 2009| 1 200,00 |  8,00  | 320,00 | 372,00  | 500,00  |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|17. |ПС "Бутово"          |   1,70   |2008 - 2009|  500,00  |        | 300,00 | 200,00  |         |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|18. |ПС "Никулино"        |   3,08   |2007 - 2009| 1 446,00 | 115,00 | 700,00 | 631,00  |         |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|19. |ПС "Первомайская"    |   4,50   |2008 - 2009| 3 044,00 | 40,00  | 400,00 |2 504,00 | 100,00  |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|20. |ПС "Очаково"         |   6,00   |2008 - 2010| 2 466,00 |        | 230,00 |1 020,00 |1 216,00 |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|21. |ПС "Белорусская"     |   5,70   |2008 - 2010| 2 200,00 |        | 200,00 |1 050,00 | 950,00  |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|22. |ПС "Ново-Гоголево"   |   2,05   |2008 - 2010|  560,00  |        | 230,00 | 220,00  | 110,00  |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|23. |ПС "МГУ"             |  4,30*   |2008 - 2010| 1 600,00 |        | 230,00 | 520,00  | 850,00  |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|24. |ПС "Мневники"        |  1,00*   |2009 - 2010|  450,00  |        | 30,00  | 320,00  | 100,00  |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|25. |ПС "Теплый Стан"     |   2,50   |2008 - 2009| 1 312,00 | 25,00  | 188,00 |1 099,00 |         |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|26. |ПС "Ваганьковская"   |   3,68   |2008 - 2010| 1 513,00 | 11,00  | 222,00 | 600,00  | 680,00  |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|27. |ПС "Ново-Кузьминки"  |   1,70   |2009 - 2010|  800,00  | 15,00  | 125,00 | 300,00  | 360,00  |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|28. |ПС "Ново-Орехово"    |  2,05*   |2009 - 2010|  843,00  |        | 130,00 | 320,00  | 393,00  |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|29. |ПС "Мещанская"       |  2,05*   |2009 - 2010|  843,00  |        | 30,00  | 320,00  | 493,00  |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|30. |ГТЭС "Молжаниновка"  |  1,00*   |2008 - 2010|  450,00  | 10,00  | 10,00  |  50,00  | 380,00  |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|31. |ГТУ на РТС-2         |  2,00*   |2009 - 2010|  600,00  |        |        | 340,00  | 260,00  |
|    |г. Зеленограда       |          |           |          |        |        |         |         |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|32. |ПС "Пресня"          |  1,00*   |2009 - 2010|  500,00  |        | 80,00  | 320,00  | 100,00  |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|33. |ПС "Сигма"           |   2,10   |2008 - 2010|  863,00  | 10,00  | 10,00  |  50,00  | 793,00  |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|34. |ПС "Хамовники"       |   5,70   |2008 - 2010| 2 343,00 |        | 100,00 | 300,00  |1 943,00 |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|35. |ПС "Красносельская"  |   2,05   |2008 - 2010| 1 800,00 |        | 250,00 | 500,00  |1 050,00 |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|36. |ГТЭС "Теплый Стан"   |   2,10   |2008 - 2010|  863,00  |        |        | 130,00  | 733,00  |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|37. |ПС "Кожевническая"   |  2,05*   |2009 - 2010|  843,00  |        |        |  80,00  | 763,00  |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|38. |ГТЭС "Жулебино"      |  1,00*   |2009 - 2010|  450,00  |        |        |  80,00  | 370,00  |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|39. |ГТЭС "Бабушкино-1"   |  1,00*   |2009 - 2010|  450,00  |        |        |  80,00  | 370,00  |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|40. |ГТЭС "Ростокино"     |  1,00*   |2009 - 2010|  450,00  |        |        |  80,00  | 370,00  |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|41. |ПС "Курская"         |  1,00*   |2009 - 2010|  850,00  |        |        |  80,00  | 770,00  |
|----+---------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|42. |ПС "Зеленоградская"  |  1,00*   |2009 - 2010|  450,00  |        |        |  80,00  | 370,00  |
|--------------------------+----------+-----------+----------+--------+--------+---------+---------|
|     Итого                |  94,43   |           |39 552,10 |1 678,00|8 500,00|15 150,10|14 224,00|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

______________________________
     * Протяженность и стоимость строительства будут уточняться  после  получения  исходных    данных и
разработки проектно-сметной документации.

     Примечание: в 2008 - 2010 годах  необходимо  осуществить  строительство  следующих    объектов: ПС
"Омега", ГТЭС "Внуково", ПС "Западная", ПС "Ново-Измайловская".".

     9. Дополнить Закон приложением 8 следующего содержания:

                                                                                          "Приложение 8
                                                                                 к Закону города Москвы
                                                                               от 5 июля 2006 года N 33

                               Инвестиционная программа Правительства Москвы по строительству кабельных коллекторов

                                                                                                                                     (млн. рублей)
+--------------------------------------------------------------------------------------------------N
| N |Наименование  |Протяжен-|   Сроки   |Стоимость|2006 год | 2007 год |2008 год |2009 год| 2010  |
|п/п|объекта       |ность, км|строительс-|строите- |         |          |         |        |  год  |
|   |              |         |    тва    | льства  |         |          |         |        |       |
|---+--------------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------+-------|
|1. |Коллектор   от|  2,11   |2002 - 2007| 455,874 | 67,103  |  13,241  |         |   -    |   -   |
|   |подстанции    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|   |"Сумская"     |         |           |         |         |          |         |        |       |
|---+--------------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------+-------|
|2. |Коллектор   от|  2,12   |2004 - 2008| 688,447 | 271,500 | 207,167  | 64,000  |   -    |   -   |
|   |подстанции    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|   |"Стромынка"   |         |           |         |         |          |         |        |       |
|---+--------------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------+-------|
|3. |Коллектор   от|   6,5   |2004 - 2008| 2078,46 | 884,000 | 347,000  | 282,045 |   -    |   -   |
|   |подстанции    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|   |"Академическая|         |           |         |         |          |         |        |       |
|   |"             |         |           |         |         |          |         |        |       |
|---+--------------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------+-------|
|4. |Коллектор   от|  1,17   |2005 - 2008| 178,714 | 82,359  |  28,411  | 14,172  |   -    |   -   |
|   |подстанции    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|   |"Чкаловская"  |         |           |         |         |          |         |        |       |
|---+--------------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------+-------|
|5. |Коллектор   от|   5,3   |2005 - 2008|1734,369 | 705,000 | 562,993  | 144,200 |   -    |   -   |
|   |подстанции    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|   |"Коньково"    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|---+--------------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------+-------|
|6. |Коллектор   от|   4,3   |2005 - 2008|1316,059 | 650,000 | 280,761  | 115,357 |   -    |   -   |
|   |подстанции    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|   |"Нарвская"    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|---+--------------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------+-------|
|7. |Коллектор   от|   0,8   |2006 - 2008| 637,355 | 100,000 | 319,400  | 211,276 |   -    |   -   |
|   |подстанции    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|   |"Сокольники"  |         |           |         |         |          |         |        |       |
|---+--------------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------+-------|
|8. |Коллектор   от|  2,99   |2006 - 2009|3627,963 | 153,056 | 1167,435 | 500,000 |1807,472|   -   |
|   |подстанции    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|   |"Угреша"      |         |           |         |         |          |         |        |       |
|---+--------------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------+-------|
|9. |Коллектор   от|  2,787  |2006 - 2008|1252,983 | 175,613 | 834,000  | 243,370 |   -    |   -   |
|   |подстанции    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|   |"Ново-Внуково"|         |           |         |         |          |         |        |       |
|---+--------------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------+-------|
|10.|Коллектор   от|   5,8   |2006 - 2008| 979,537 | 240,942 | 484,000  | 254,595 |   -    |   -   |
|   |подстанции    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|   |"Говорово"    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|---+--------------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------+-------|
|11.|Коллектор   от|  1,98   |2006 - 2008|1094,059 | 256,619 | 580,456  | 243,371 |   -    |   -   |
|   |подстанции    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|   |"Заболотье"   |         |           |         |         |          |         |        |       |
|---+--------------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------+-------|
|12.|Коллектор   от|  1,25   |2006 - 2008| 107,677 | 50,000  |  61,815  | 28,362  |   -    |   -   |
|   |подстанции    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|   |"Семеновская" |         |           |         |         |          |         |        |       |
|---+--------------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------+-------|
|13.|Коллектор   от|   2,7   |2006 - 2009|1551,474 | 150,000 | 179,050  | 340,464 |900,796 |   -   |
|   |подстанции    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|   |"Бабушкин"    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|---+--------------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------+-------|
|14.|Коллектор   от|  3,25   |2005 - 2009|1589,000 | 737,000 | 600,000  | 100,000 |152,000 |   -   |
|   |подстанции    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|   |"Герцево"     |         |           |         |         |          |         |        |       |
|---+--------------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------+-------|
|15.|Коллектор   от|   2,4   |2005 - 2009|1191,085 | 710,085 | 281,000  | 50,000  |150,000 |   -   |
|   |подстанции    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|   |"Давыдковская"|         |           |         |         |          |         |        |       |
|---+--------------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------+-------|
|16.|Коллектор   от|  2,07   |2007 - 2009| 948,503 | 13,699  | 180,413  | 630,628 |123,763 |   -   |
|   |подстанции    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|   |"ТЭЦ-16"      |         |           |         |         |          |         |        |       |
|---+--------------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------+-------|
|17.|Коллектор   от|  6,64   |2006 - 2009|2622,772 | 180,000 | 1322,607 | 200,076 |1080,930|   -   |
|   |подстанции    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|   |"ТЭЦ-21"      |         |           |         |         |          |         |        |       |
|---+--------------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------+-------|
|18.|Коллектор   от|  1,82   |2006 - 2008|1196,121 | 100,000 | 805,742  | 278,084 |   -    |   -   |
|   |подстанции    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|   |"Дубнинская"  |         |           |         |         |          |         |        |       |
|---+--------------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------+-------|
|19 |Коллектор   от|   6,4   |2005 - 2009|4030,200 | 440,000 | 273,000  | 300,000 |3017,000|   -   |
|   |подстанции    |         |           |         |         |          |         |        |       |
|   |"СИТИ-2"      |         |           |         |         |          |         |        |       |
|------------------+---------+-----------+---------+---------+----------+---------+--------+-------|
|Всего             |         |           |27 280,65|5 966,976|8 528,941 |4 000,000|   7    |   -   |
|                  |         |           |         |         |          |         |231,961 |       |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

     Примечание:  источник  финансирования  -  средства  бюджета   города
Москвы.
     Стоимость и сроки строительства  будут  уточняться  при   разработке
проектно-сметной документации.".

     Статья 2
     Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.

Мэр Москвы                                                    Ю.М. Лужков

Москва, 
Московская городская Дума
16 июля 2008 года
N 38