Постановление Правительства Москвы от 23 июня 2009 г. N 597-ПП "О неотложных мерах по стимулированию инвестиционной и предпринимательской деятельности в городе Москве"

     В целях совершенствования работы органов исполнительной влас-
ти города Москвы по поддержке и реализации  инвестиционных  проек-
тов, повышению эффективности привлечения инвестиций,  в целях уве-
личения  объемов  строительства и сохранения рабочих мест в строи-
тельном комплексе,  обеспечения  защиты  инвестиций  Правительство
Москвы постановляет:
     1. В  целях сокращения сроков рассмотрения документов о прод-
лении сроков реализации инвестиционного проекта и внесении измене-
ний  в  действующие инвестиционные контракты и договоры аренды зе-
мельных участков внести изменения  в  постановление  Правительства
Москвы от 27 марта 2007 г.  N 196-ПП "О порядке рассмотрения обра-
щений о внесении изменений в договоры аренды земельных участков  и
инвестиционные контракты (договоры),  предусматривающие строитель-
ство (реконструкцию) градостроительных объектов, или об их растор-
жении" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 18 декаб-
ря 2007 г. N 1097-ПП, от 22 января 2008 г. N 46-ПП, от 30 сентября
2008 г. N 894-ПП):
     1.1. Пункт 3.2 постановления изложить в следующей редакции:
     "3.2. Действие  настоящего постановления не распространяется:
     - на случаи внесения изменений в  договоры  аренды  земельных
участков в связи с принятием Правительством Москвы правовых актов,
изменяющих размер арендной платы за землю, находящуюся в собствен-
ности города Москвы;
     - в  отношении объектов,  введенных в установленном порядке в
эксплуатацию,  реализация которых осуществляется на основании зак-
люченных от имени Правительства Москвы инвестиционных контрактов и
договоров аренды земельных участков.".
     1.2. Абзац второй пункта 1.3 приложения к  постановлению  до-
полнить словами  "По  согласованию с органом исполнительной власти
города Москвы прилагаемые к запросу копии обращений и иные матери-
алы  могут  направляться  в виде электронных образов на оптическом
носителе.".
     1.3. Пункт  1.3 приложения к постановлению дополнить абзацами
в следующей редакции:
     "Москонтроль вправе подготовить решение по существу обращения
на основании имеющихся материалов и документов.  В этом  случае  к
решению прилагается  проект соответствующего правового акта и ука-
занные документы направляются должностным лицам и органам исполни-
тельной власти города Москвы,  определяемым Москонтролем. B случае
согласования  указанными  органами  исполнительной  власти  города
Москвы проекта правового акта его дальнейшее согласование осущест-
вляется в порядке,  предусмотренном пунктом 1.7 настоящего Положе-
ния.  В  случае  отказа в согласовании проекта правового акта либо
при наличии замечаний к нему органы исполнительной  власти  города
Москвы обязаны представить в Москонтроль мотивированное заключение
с приложением обосновывающих его документов.  В этом случае  даль-
нейшее рассмотрение обращения осуществляется в порядке, предусмот-
ренном пунктами 1.10 и 1.5 настоящего Положения.
     Подготовка решений о продлении сроков реализации инвестицион-
ного проекта в рамках срока строительства, определенного проектной
документацией (проектом организации строительства),  имеющей поло-
жительное заключение Мосгосэкспертизы  при  соблюдении  инвестором
сроков выполнения первого этапа инвестиционного контракта осущест-
вляется без получения заключений органов исполнительной власти го-
рода Москвы.".
     1.4. Пункт 1.4 приложения к постановлению  дополнить  абзацем
четвертым в следующей редакции:
     "Заключения направляются в Москонтроль нарочным, фельдъегерс-
кой  связью  или факсограммой с обязательным дублированием факсог-
раммы направляемым по почте письмом.".
     1.5. Абзац второй пункта 1.6 приложения к постановлению изло-
жить в следующей редакции:
     "Согласование проекта  правового  акта  Правительства  Москвы
осуществляется в  срок,  установленный  Регламентом  Правительства
Москвы.".
     1.6. Пункт  1.7 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:
     "1.7. Проект правового акта Правительства Москвы  согласуется
с  Правовым  управлением  Правительства  Москвы и Аппаратом Мэра и
Правительства Москвы.".
     2. Внести  изменения  в постановление Правительства Москвы от
21 февраля 2006 г. N 112-ПП "О Регламенте Правительства Москвы" (в
редакции  постановлений  Правительства Москвы от 21 ноября 2006 г.
N  903-ПП,  от  27 марта 2007 г.  N 196-ПП, от 11 сентября 2007 г.
N  799-ПП,  от  2 декабря 2008 г. N 1100-ПП, от 10 февраля 2009 г.
N 87-ПП,  от  14  апреля  2009  г.  N  296-ПП,  от  5  мая 2009 г.
N 390-ПП):
     2.1. Пункт 3.2.1.9 приложения к постановлению дополнить абза-
цем в следующей редакции:
     "К проекту распорядительного документа по  вопросам  внесения
изменений  в  договор аренды земельного участка или инвестиционный
контракт (договор),  предусматривающий строительство  (реконструк-
цию) градостроительных объектов, применения мер ответственности за
невыполнение условий указанного договора или  о  его  расторжении,
подготовленному  в  соответствии с решением Москонтроля,  решением
Мэра Москвы по докладу Москонтроля,  прилагается указанное решение
Москонтроля или решение Мэра  Москвы  (копия  резолюции),  включая
доклад Москонтроля. В этом случае приложение пояснительной записки
не обязательно.".
     2.2. Абзац второй пункта 3.2.3.1 приложения  к  постановлению
изложить в следующей редакции:
     "Согласование проекта распорядительного документа по вопросам
внесения  изменений в договор аренды земельного участка или инвес-
тиционный контракт (договор), предусматривающий строительство (ре-
конструкцию)  градостроительных  объектов,  применения мер ответс-
твенности за невыполнение условий указанного договора  или  о  его
расторжении осуществляется по упрощенному порядку, который предус-
матривает согласование с Правовым управлением Правительства Москвы
и Аппаратом Мэра и Правительства Москвы.".
     3. В целях сокращения сроков оформления инвестиционных  доку-
ментов внести изменения в постановление Правительства Москвы от 28
декабря 2005 г. N 1089-ПП "Об утверждении единого порядка согласо-
вания, оформления, подписания и учетной регистрации инвестиционных
контрактов" (в редакции постановлений Правительства Москвы  от  18
декабря 2007 г. N 1097-ПП, от 30 декабря 2008 г. N 1249-ПП):
     3.1. Абзац второй пункта 3 постановления заменить абзацами  в
следующей редакции:
     "Инвестиционный контракт,  дополнительное соглашение к  нему,
протоколы  предварительного  (итогового)  распределения площадей и
акты о результатах реализации (частичной реализации)  инвестицион-
ных  проектов согласовываются с Москонтролем после согласования со
всеми необходимыми организациями и должностными лицами до подписа-
ния уполномоченным лицом Правительства Москвы.
     Инвестиционный контракт и дополнительное  соглашение  к  нему
согласовываются  с Правовым управлением Правительства Москвы после
согласования со всеми необходимыми  организациями  и  должностными
лицами  до  подписания  уполномоченным лицом Правительства Москвы.
Согласование протоколов предварительного (итогового) распределения
площадей  и  актов о результатах реализации (частичной реализации)
инвестиционных проектов Правовым управлением Правительства  Москвы
не осуществляется.".
     3.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
     "4. Утвердить  следующие сроки согласования проектов инвести-
ционных контрактов,  дополнительных соглашений к  ним,  протоколов
предварительного  (итогового) распределения площадей и актов о ре-
зультатах реализации (частичной реализации) инвестиционных  проек-
тов с момента их поступления в органы исполнительной власти города
Москвы:
     4.1. Подготовка префектурой соответствующего административно-
го округа города Москвы совместно с инвестором  проекта  документа
(п.4) и  направление его одновременно на согласование в органы ис-
полнительной власти города Москвы - не более 15 рабочих дней.
     4.2. Осуществление согласования проектов инвестиционных конт-
рактов и дополнительных  соглашений  к  ним,  проектов  протоколов
предварительного  (итогового) распределения площадей и актов о ре-
зультатах реализации (частичной реализации) инвестиционных  проек-
тов:
     4.2.1. Департаментом жилищной политики и жилищного фонда  го-
рода Москвы (по объектам смешанного и жилого назначения), Департа-
ментом имущества города Москвы (по объектам смешанного и  нежилого
назначения), Департаментом экономической политики и развития горо-
да Москвы (по объектам жилого,  смешанного и нежилого назначения),
Департаментом науки и промышленной политики города Москвы (при не-
обходимости,  по вопросам перебазирования, вывода, реформирования,
ликвидации организаций промышленности и науки и реорганизации про-
изводственных территорий), Комитетом по культурному наследию горо-
да Москвы (при необходимости,  по объектам, являющимся памятниками
истории и культуры), иными структурами - не более 10 рабочих дней.
     4.2.2. Контрольным комитетом города Москвы - не более 7 рабо-
чих дней с последующим направлением пакета документов и заключения
по согласованию в Правовое  управление  Правительства  Москвы  (по
проектам  протоколов  предварительного  (итогового)  распределения
площадей и актов о результатах реализации  (частичной  реализации)
инвестиционных проектов - в Тендерный комитет).
     4.2.3. Правовым управлением Правительства Москвы - не более 7
рабочих дней с последующим направлением пакета документов и заклю-
чения по согласованию в Тендерный комитет.
     4.2.4. Органы  исполнительной власти города Москвы направляют
копию заключения о согласовании в адрес первого  заместителя  Мэра
Москвы в Правительстве Москвы, возглавляющего Комплекс экономичес-
кой политики и развития города Москвы.
     4.3. Согласованные проекты инвестиционных контрактов,  допол-
нительных соглашений к ним,  протоколов предварительного (итогово-
го) распределения площадей и актов о результатах реализации  (час-
тичной реализации) инвестиционных проектов (п.4.2.1) представляют-
ся  в  соответствующую  префектуру административного округа города
Москвы,  которая формирует в срок не более 5 рабочих дней  оконча-
тельную редакцию инвестиционного документа и представляет ее в ус-
тановленном порядке в Москонтроль (п.4.2.2).
     В случае возникновения спорных вопросов  урегулирование  раз-
ногласий  осуществляется  первым заместителем Мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы,  возглавляющим Комплекс экономической политики  и
развития города Москвы.
     4.4. Установить:
     4.4.1. Что предельный срок согласования и оформления инвести-
ционных контрактов,  дополнительных  соглашений к ним,  протоколов
предварительного (итогового) распределения площадей и актов о  ре-
зультатах  реализации (частичной реализации) инвестиционных проек-
тов не должен превышать 30 рабочих дней.
     4.4.2. Персональную ответственность:
     - руководителей  органов исполнительной власти города Москвы,
указанных в пункте 4.2 настоящего постановления,  за  рассмотрение
проекта  инвестиционного  контракта,  дополнительного соглашения к
нему,  протокола предварительного (итогового) распределения площа-
дей  и акта о результатах реализации (частичной реализации) инвес-
тиционного проекта исключительно в рамках своей компетенции;
     - префектов административных округов города Москвы за качест-
во и сроки подготовки проекта инвестиционного контракта,  дополни-
тельного соглашения к нему, протокола предварительного (итогового)
распределения площадей и акта о результатах реализации  (частичной
реализации) инвестиционного проекта и полноту прилагаемых докумен-
тов при направлении его на согласование в структурные  подразделе-
ния Правительства Москвы.
     4.4.3. Что при наличии в инвестиционном контракте  (договоре)
доли города  Москвы в натуральном выражении префектурами админист-
ративных округов города Москвы до оформления  акта  о  результатах
реализации  (частичной реализации) инвестиционного проекта в тече-
ние 5 рабочих дней с момента  получения  материалов  от  инвестора
направляется  запрос с приложением необходимых материалов в Депар-
тамент имущества города Москвы и Департамент жилищной  политики  и
жилищного  фонда города Москвы для подготовки заключений о целесо-
образности получения доли города по инвестиционному контракту (до-
говору)  в натуральном выражении или определения площадей в объек-
те, подлежащих передаче в собственность города Москвы.".
     3.3. Пункты 5.1,  6 и 8 постановления считать утратившими си-
лу.
     3.4. Пункт  3.1 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:
     "3.1. Проект инвестиционного контракта,  дополнительного сог-
лашения к нему, протокола предварительного (итогового) распределе-
ния  площадей  и акта о результатах реализации (частичной реализа-
ции) инвестиционного проекта разрабатывается префектурой соответс-
твующего административного округа города Москвы совместно с инвес-
тором на основании принятого  распорядительного  документа  Прави-
тельства Москвы.".
     3.5. Пункты 3.2 и 4.8 приложения к постановлению признать ут-
ратившими силу.
     3.6. Пункт 3.3 приложения к постановлению изложить в  следую-
щей редакции:
     "3.3. Согласующие организации (за исключением  Москонтроля  и
Правового управления  Правительства Москвы) по итогам рассмотрения
проекта инвестиционного контракта,  дополнительного  соглашения  к
нему,  протокола предварительного (итогового) распределения площа-
дей и акта о результатах реализации (частичной реализации)  инвес-
тиционного проекта составляют короткое заключение,  которое подпи-
сывается руководителем согласующей организации или  уполномоченным
должностным  лицом,  и  направляют  заключение вместе с проектом в
префектуру соответствующего административного округа города  Моск-
вы.".
     3.7. Пункт 4.1 приложения к постановлению считать  утратившим
силу.
     3.8. Пункт 4.4 приложения к постановлению изложить в  следую-
щей редакции:
     "4.4. В случае отсутствия согласований либо выявления несоот-
ветствий, носящих принципиальный характер, префектура соответству-
ющего административного округа города Москвы в  недельный  срок  с
даты  поступления последнего экземпляра согласованного проекта ин-
вестиционного контракта, дополнительного соглашения к нему, прото-
кола  предварительного (итогового) распределения площадей и акта о
результатах реализации (частичной реализации) инвестиционных  про-
ектов  направляет  первому заместителю Мэра Москвы в Правительстве
Москвы,  возглавляющему Комплекс экономической политики и развития
города Москвы, указанный документ с оформленным листом разногласий
и пакетом материалов для урегулирования возникших разногласий.".
     4. Внести изменения в постановление Правительства  Москвы  от
27  июня 2006 г.  N 430-ПП "О порядке подтверждения дополнительных
затрат инвесторов,  возникающих при реализации инвестиционных про-
ектов,  финансируемых за счет внебюджетных источников" (в редакции
постановления Правительства Москвы от 8 мая 2007 г. N 331-ПП):
     4.1. Заголовок постановления дополнить словами:  ",  и прямых
затрат инвесторов при расторжении инвестиционных контрактов и  до-
говоров аренды земельного участка".
     4.2. В пункте 1 постановления слова "инвестора по ранее  зак-
люченным инвестиционным контрактам осуществляется" заменить слова-
ми "инвесторов,  возникающих при реализации инвестиционных  проек-
тов, финансируемых за счет внебюджетных источников по ранее заклю-
ченным инвестиционным контрактам,  и прямых затрат инвесторов  при
расторжении инвестиционных контрактов и договоров аренды земельно-
го участка осуществляется".
     4.3. Пункт 1.3 постановления изложить в следующей редакции:
     "1.3. По фактическим затратам, связанным с выполнением проек-
тных  и  строительных  работ,  в том числе по подготовке земельных
участков к строительству,  и подлежащим компенсации, Департаментом
дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы на ос-
новании сводного сметного  расчета,  составленного  по  нормативам
МГСН-81-98 или ТСН-2001, установленным для выполнения работ по го-
родскому заказу и приведенным в уровень цен на момент начала  про-
изводства строительных работ, и согласованного в установленном по-
рядке Мосгосэкспертизой.".
     4.4. Дополнить постановление пунктами 3, 4, 5 в следующей ре-
дакции:
     "3. Возложить  функции  по  подготовке итоговых заключений по
порядку и условиям возмещения  понесенных  затрат  на  Департамент
экономической политики и развития города Москвы.
     4. Возложить функции:
     4.1. Главного  распорядителя  средств  бюджета города Москвы,
направляемых на осуществление  компенсационных  выплат  инвесторам
прямых затрат,  возникающих при реализации инвестиционных проектов
и подлежащих компенсации при их расторжении, на Департамент эконо-
мической политики и развития города Москвы.
     4.2. По подтверждению дополнительных затрат инвесторов,  воз-
никающих при реализации инвестиционных проектов,  финансируемых за
счет  внебюджетных  источников по ранее заключенным инвестиционным
контрактам, и прямых затрат инвесторов при расторжении  инвестици-
онных  контрактов  и  договоров  аренды земельного участка в части
затрат,  связанных с выполнением проектных и строительных работ, в
том числе по подготовке земельных участков к строительству, на Де-
партамент дорожно-мостового  и  инженерного  строительства  города
Москвы.
     5. Установить, что:
     5.1. Решением для проведения мероприятий по компенсации поне-
сенных затрат инвесторам является соответствующий распорядительный
документ  Правительства Москвы,  подготовка и выпуск которого осу-
ществляются префектурой соответствующего административного  округа
города  Москвы  на основании заключения Департамента экономической
политики и развития города Москвы (судебных  решений),  отражающий
источники их финансирования.
     5.2. В случае,  если  положениями  инвестиционных  контрактов
(договоров) не предусмотрены условия компенсации понесенных затрат
инвесторам,  урегулирование вопросов компенсации возможно исключи-
тельно в судебном порядке.
     5.3. Возможность компенсации дополнительных затрат  инвестора
может  быть  урегулирована  путем внесения в установленном порядке
изменений в условия реализации инвестиционных контрактов на  осно-
вании  заключения  Департамента  экономической политики и развития
города Москвы.".
     4.5. Пункты 3 и 4 постановления считать соответственно  пунк-
тами 6 и 7.
     5. В целях повышения эффективности мониторинга реализации ин-
вестиционных проектов на территории города Москвы:
     5.1. Префектам  административных округов города Москвы ежеме-
сячно до 5 числа месяца,  следующего за отчетным, представлять ин-
формацию в Департамент городского строительства города  Москвы  по
объектам, имеющим разрешения на строительство.
     5.2. Департаменту   городского  строительства  города  Москвы
обеспечить информационно-аналитическое сопровождение  контроля  за
реализацией инвестиционных проектов,  по которым получено разреше-
ние на строительство,  и обобщение представляемой префектурами ад-
министративных округов города Москвы информации (п.5.1) с  направ-
лением  сводной информации не позднее 15 числа месяца,  следующего
за отчетным, первым заместителям Мэра Москвы в Правительстве Моск-
вы, возглавляющим Комплекс экономической политики и развития горо-
да Москвы и Комплекс градостроительной  политики  и  строительства
города Москвы, а также в Москонтроль.
     5.3. Департаменту  городского  строительства  города Москвы в
10-дневный срок направить префектам административных округов горо-
да Москвы регламентную форму для заполнения при представлении дан-
ных (п.5.1).
     6. Департаменту  экономической  политики  и  развития  города
Москвы в недельный срок направить префектам административных окру-
гов города Москвы регламентную форму для проведения инвентаризации
всех инвестиционных проектов.
     7. Префектам  административных округов города Москвы:
     7.1. В  месячный  срок  после  выполнения пункта 6 настоящего
постановления провести инвентаризацию выполнения и реализации всех
инвестиционных  проектов и представить ее результаты в Департамент
экономической политики и развития города Москвы с указанием  конк-
ретных  мероприятий по поддержке выполнения инвестиционных намере-
ний в целях продолжения реализации соответствующих проектов.
     7.2. В  месячный  срок провести инвентаризацию правовых актов
города Москвы,  предусматривающих заключение инвестиционных  конт-
рактов, но  по  которым  инвестиционные контракты не заключены,  с
указанием причин,  а также информации о наличии у инвесторов  прав
на  земельные  участки,  на которых планируется осуществить строи-
тельство (реконструкцию) объектов,  и представить ее результаты  в
Москонтроль  для  подготовки предложений по их дальнейшей реализа-
ции.
     8. Департаменту  экономической  политики  и  развития  города
Москвы по результатам выполнения пункта 7 настоящего постановления
в двухмесячный срок подготовить и представить на рассмотрение Пра-
вительства Москвы проект распорядительного документа, предусматри-
вающий меры экономического стимулирования и поддержки инвестицион-
ных намерений.
     При подготовке распорядительного документа рассмотреть  целе-
сообразность следующих форм поддержки:
     - предоставление рассрочки платежей в бюджет города Москвы на
период строительства;
     - установление срока начала выплат с момента получения разре-
шения на строительство;
     - при завершении строительства жилых домов переход от получе-
ния жилой доли в денежном выражении на натуральное выражение с ус-
тановлением цены в объеме затрат по себестоимости их строительства
с регулируемой в установленном порядке нормой рентабельности.
     9. Первому заместителю Мэра Москвы  в  Правительстве  Москвы,
возглавляющему Комплекс градостроительной политики и строительства
города Москвы,  префектам административных округов  города  Москвы
усилить  контроль  за ходом реализации инвестиционных проектов,  в
частности каждого отдельного этапа работ и сроков выполнения  обя-
зательств сторонами.
     10. Префектам административных округов  города  Москвы  до  1
сентября  2009 г.  обеспечить завершение оформления дополнительных
соглашений в соответствии с принятыми до 1 мая 2009  г.  правовыми
актами  Правительства Москвы о внесении изменений в инвестиционные
контракты (договоры).
     11. В  целях  информационного обеспечения деятельности Прави-
тельства Москвы в инвестиционной сфере, своевременного и эффектив-
ного информирования жителей, бизнес-сообщества и потенциальных ин-
весторов признать целесообразным создание  единого  общегородского
информационного портала (далее - Портал).
     11.1. Департаменту  городского  строительства  города Москвы,
Департаменту имущества города Москвы,  Департаменту земельных  ре-
сурсов города Москвы, Департаменту дорожно-мостового и инженерного
строительства города Москвы и Москомархитектуре  в  месячный  срок
представить  в  Департамент города Москвы по конкурентной политике
предложения по интеграции в Портал существующих (действующих)  ин-
формационных  систем  и  ресурсов  для формирования,  наполнения и
дальнейшей актуализации сведений по инвестиционным объектам.
     11.2. Департаменту города Москвы по конкурентной политике:
     11.2.1. В  месячный  срок  подготовить техническое задание по
созданию Портала.
     11.2.2. В  III квартале 2009 г.  подготовить и представить на
рассмотрение Правительства Москвы проект правового  акта,  предус-
матривающий утверждение положения о Портале, регламент его ведения
и информационного  наполнения,  а  также организационно-финансовый
механизм разработки и внедрения Портала.
     12. Внести  изменения в постановление Правительства Москвы от
27 июня 2006 г.  N 444-ПП "Об усилении контроля и  ответственности
за реализацию инвестиционных проектов на территории города Москвы"
(в редакции  постановлений  Правительства  Москвы  от  18  декабря
2007 г.  N  1097-ПП,  от  29  апреля 2008 г.  N 342-ПП,  от 20 мая
2008 г. N 417-ПП, от 30 декабря 2008 г. N 1256-ПП):
     12.1. Пункт 2 постановления признать утратившим силу.
     12.2. Пункт 13 постановления изложить в следующей редакции:
     "13. Установить, что внесение изменений и дополнений в инвес-
тиционные контракты и договоры аренды земельных участков с  правом
застройки  по  инвестиционным  объектам,  заключенные на основании
правовых актов Правительства Москвы,  осуществляется исключительно
на  основании  и  в  соответствии с правовыми актами Правительства
Москвы,  за исключением случаев включения в условия инвестиционных
контрактов  возможности взимания штрафных санкций в денежном выра-
жении, а также переуступки прав и обязанностей.".
     13. Возложить  функции  по  контролю  за  ходом  подготовки и
оформления проектов инвестиционных контрактов, дополнительных сог-
лашений  к  ним,  актов  о реализации инвестиционных контрактов на
первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, возглавля-
ющего Комплекс экономической политики и развития города Москвы,  с
использованием данных Портала (п.11).
     14. Первому  заместителю  Мэра Москвы в Правительстве Москвы,
возглавляющему Комплекс экономической политики и  развития  города
Москвы:
     14.1. При осуществлении контроля за ходом согласования проек-
тов  инвестиционных  контрактов,  дополнительных соглашений к ним,
актов о реализации (частичной реализации) инвестиционных  проектов
ежемесячно  представлять  в  Аппарат  Мэра  и Правительства Москвы
сводную информацию о результатах  работы  соответствующих  органов
исполнительной власти города Москвы.
     14.2. Совместно с руководителем Аппарата Мэра и Правительства
Москвы при необходимости вносить предложения Мэру Москвы о привле-
чении  к  дисциплинарной ответственности государственных служащих,
допустивших должностные нарушения,  которые привели к  затягиванию
сроков оформления вышеуказанных документов, в порядке, установлен-
ном Законом города Москвы от 26 января 2005 г.  N 3  "О  государс-
твенной  гражданской  службе города Москвы" и распоряжением Прави-
тельства Москвы от 26 февраля 2007 г. N 308-РП "О внесении измене-
ний  в распоряжение Правительства Москвы от 12 сентября 2005 г.  N
1776-РП".
    15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на  первых   заместителей   Мэра   Москвы  в  Правительстве Москвы
Росляка Ю.В.  и Ресина В.И.  и префектов административных  округов
города Москвы.
     О ходе выполнения постановления доложить  Мэру  Москвы  в  IV
квартале 2009 г.

Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков